문서번호	도로보수과-11797
결재일자	2023. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
김원기	박해웅	代박해웅	11/17
			임대운
협 조

공사 설계변경 검토 보고(제1회,최종)

[2023년 노후포장도로 정비공사(2구역)]

2023. 11.

동부도로사업소

(도로보수과)

공사 설계변경 검토 보고(제1회,최종)

[2023년 노후포장도로 정비공사(2구역)]

우리 사업소에서 시행중인 『2023년 노후포장도로 정비공사』와 관련, 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경(제1회,최종) 사항에 대해 검토결과를 보고드림

	1		추진 현황

○ '23년 도로포장 정비 추진계획 및 예산재배정 알림(도로관리과-359호, ’23.01.06.)

○ '23년 포장도로 유지관리사업 추진계획(도로보수과-605호, ’23.01.18.)

○ '23년 노후포장 정비공사(2구역) 공사계약 의뢰(도로보수과-1867호, ’23.02.22.)

○ 계약체결 통보(재무과-14924호, ’23.03.27.)

○ 포장도로 포트홀 항구복구 계획(도로보수과-7147호, ’23.07.17.)

○ 낙찰차액 및 집행잔액 사용계획 보고(도로보수과-9454호, ’23.09.15.)

○ 포장도로 포트홀 항구복구 결과보고(도로보수과-9687호, ’23.09.20.)

○ 설계변경 검토보고[2023년 노후포장도로 2구역(건설사업관리 23-380호, ’23.10.26.)]

	2		공사 개요

○ 공 사 명: 2023년 노후포장도로 정비공사(2구역)

○ 공사기간: 2023.3.29. ~ 2023.11.30.

○ 공사개요: 절삭후 재포장(t=5~20㎝) 1,047.6a

○ 공사금액: ***************************************************

○ 시 공 자: **************

	3		보고 내용

○ 포트홀 항구복구 시행 관련 신규공종 발생 및 공종별 실 시공물량 증·감 사항을 반영하여 기 계약된 공종의 물량조정(증·감) 시행

○ 공종별 수량변경 내역

구분	공 종	수 량 변 경 내 역			금액변경내역 (천원)
		당초	변경	증·감
********	****	******	******	*********	********
********	*****	*****	******	*********	********
********	*****	*****	******	*********	**********
*******	**************	*	*****	*********	*********

○ 설계변경 현황

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감 금 액	비고
*		*************	*************	**************
***	****	*************	*************	**************
	*****	***********	***********	**************
	**	*************	*************	**************
*****		*************	*************	**************
******		**********	*********	***************

○ 소요예산 검토

- 당해 공사의 낙찰차액 및 재난관리기금(응급복구)를 활용하여 설계변경 시행

[가용 예산액 및 사용액]

(단위:원)

가용 예산			사용액
합계	낙찰차액	재난관리기금
***********	***********	***********	***********

	4		조치계획

○ 당해 공사의 건설사업관리자로부터 제출된 설계변경 내용이 적정하므로 설계변경 및 재계약 시행코자 함.

○ 예산과목

********************************************************************************

***************************************************************************

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.