문서번호	기전과-11974
결재일자	2023. 11. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박정민		11/19
		이상연
협조	주무관		최한욱
	주무관		김정중

보행신호 보조장치 원인자부담공사 준공검사 결과보고

「노원구 관급자재구매(보행신호 음성안내 보조장치_상명초교 외 4개소) 설치공사」

2023. 11.

북부도로사업소

(기전과)

보행신호 보조장치 원인자부담공사 준공검사 결과보고

「노원구 관급자재구매(보행신호 음성안내 보조장치_상명초교 외 4개소) 설치공사」

노원구청에서 원인자부담공사로 시행하는『관급자재구매(보행신호 음성안내 보조장치_상명초교 외 4개소) 설치공사』에 대한 준공검사를 실시하고 그 결과에 따른 조치계획을 보고드림

□ 관련근거

○ 2023.04.10. 교통안전시설 개선 설치 통보(하달)(교통관리과-8574호)

○ 2023.06.09. 원인자부담공사 승인요청(교통지도과-17008호)

○ 2023.06.19. 시공계획서 및 기자재승인원 제출(다원 제2023-58호)

○ 2023.06.26. 원인자부담공사 승인 통보(기전과-6292호)

○ 2023.08.02. 준공기한 연기원 제출(다원 제2023-104호)

○ 2023.08.04. 공사(준공)기한 연장 승인(기전과-7887호)

○ 2023.09.21. 원인자부담공사 준공서류 제출(다원 제2023-138호)

○ 2023.09.21. 원인자부담공사 준공검수 입회 요청(기전과-9787호)

○ 2023.11.17. 준공검수 보완조치 결과보고(다원 제2023-189호)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 노원구 관급자재구매(보행신호 음성안내 보조장치_상명초교 외 4개소) 설치공사

○ 공사장소: 노원구 중계동 515-1(상경초교 외 4개소)

○ 공사기간: 승인통보일로부터 ~ 2023.08.31.

○ 원 인 자: **********

○ 공사관련업체

구 분	설 계 사	감 리 사	시 공 사	비 고
**************	**** *****	******	*****	*****************

□ 공사내용

○ 보행신호 음성안내 보조장치 10대(신설)

-****************************************************************

□ 점검내용

○ 점 검 일: 2023.09.26.(화) 14:00

○ 점 검 자: 사업소 담당자, 노원경찰서, 노원구청, 감리사, 시공사

○ 점검내용

- 제어부 함체 지주 높이 2.5m 상단 설치 확인

- 후레시블 ∅16mm 전선관 사용 및 준공표찰 부착

- KS규격 전원 1.5SQ×3C 이상 사용 및 케이블 라벨부착 여부 확인

- 초기 동작 이후 음성안내 보조장치 기능 정상작동 유무 확인

(상태감지, 위반감지, 음향신호 등)

○ 점검결과: 설치기준에 적합하게 시공됨.

□ 조치의견

○ 보행신호 보조장치 원인자부담공사 준공검사 지적사항 조치 및 준공검사 점검 결과 관련규정에 의거 적합하게 시공되어 준공처리하고 그 결과를 원인자 및 유관기관에 준공승인 통보코자 함.

붙임 1. 준공검사 체크리스트 1부.

2. 준공검사 사진대지 1부.

3. 준공도서 1부(별도).  끝.