문서번호	시설보수과-10029
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	11/20
			이경우
협조

「목동교동측IC 외 1개소 보수공사」

예비준공검사 실시계획

2023. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

「목동교동측IC 외 1개소 보수공사」

예비준공검사 실시계획

2023년 예산사업으로 시행중인「목동교동측IC 외 1개소 보수공사」에 대한 예비준공검사를 실시하여 공사 품질관리에 철저를 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 예비준공검사 개선대책 [기술심사담당관-10127(2018.6.29)]

- 검사대상 : 감독권한대행 등 건설사업관리시행공사

- 안전관리계획 수립 대상 공사(시특법상 1·2종 시설물 등)

- 시행시기 : 준공 2개월 전

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 목동교동측IC 외 1개소 보수공사

ㅇ 공사내용 : 표면보수 946㎡, 단면보수 166㎡, 신축이음보수 108m

ㅇ 공사기간 : ‘23. 5. 25.~12. 13.

ㅇ 공 사 비 : 537백만원(도급비 340, 관급비 194, 이전비 3)

ㅇ 도 급 사 : (주)지승유지스 대표 신학용

ㅇ 감독기관 : 서울시설공단(공사감독1처)

ㅇ 추진공정 : 92%

□ 예비준공검사 계획

ㅇ 검 사 일 : 2023. 11. 21.(화) 10:00 ~

ㅇ 검 사 자 : 시설보수과 사업담당 김재윤 외 1명

서울시설공단 공사감독1처 공사감독, 시공사 현장대리인

ㅇ 검사내용 : 계약공종 전반에 대한 시공상태 등 하자여부 검사

□ 향후계획

ㅇ 2023. 11.      : 예비준공검사조서 작성

- 검사결과 지적사항 발생시 : 준공 전 완료토록 감독기관 통보

ㅇ 2023. 11.~12. : 잔여공종 등 현장정리

ㅇ 2023. 12.      : 설계변경 및 준공

붙  임  : 예비준공검사 조서 1부.  끝.