문서번호	정수시설과-9964
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김덕신		代조강혁	11/20
			서한호
협조
	안전관리팀장		조강혁

『2023년 모터펌프 및 기계설비 유지보수』

1차수 설계변경 심의결과보고

2023.  11.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

『2023년 모터펌프 및 기계설비 유지보수』

1차수 설계변경 심의결과보고

2023년 기계설비 유지보수 연간단가 시행중 1차수 정산(1,2차 작업) 물량의 증·감 및 신규공정에 대한 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2023년 뚝도아리수정수센터 모터펌프 및 기계설비 유지보수

○ 사업기간 : 2023. 5. 4. ~ 2024. 3. 31.

○ 계약금액 : *************(1차수 : 금143,851,490원)

○ 업 체 명 : *************

Ⅱ		설계변경 심의 개최 현황

□ 개최현황

○ 일    시 : 2023년 11월 15일(수) 14:30~15:00

○ 장    소 : 뚝도아리수정수센터 내

○ 참석인원 : 총 5명

- 위 원 장 : 정수시설과장 代 조강혁

- 심의위원 : 공업6급 배용우, 공업7급 최재호, 조혜성, 이철규

Ⅲ		설계변경 세부내용 및 사유

□ 관련근거

○ 기계설비 유지보수 1차 작업지시 계획 : 정수시설과-3643('23.6.1)

○ 기계설비 유지보수 2차 작업지시 계획 : 정수시설과-7575('23.9.13)

□ 설계변경 금액 내역

○ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	***********	***********	********
1차수 계약금액	***********	***********	********
2차수 계약금액	**********	**********	*

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 세부 물량 및 변경사항 : 설계변경(정산)내역서 첨부

□ 주요 변경 사항

○ (감)기존 계약 물량 정비 불필요하여 감액실시(공사원가 107백만원)

************

************

○ (증)신규공정 발생 및 시공물량 추가에 따른 설계변경(공사원가 106백만원)

*************************

***********************

******************

*************************************

**********************

****************************

*************************

**************************

**********************

******************

*****************************

*************************

********************

*************************

************************

*******************

*******************

Ⅳ		심 의 결 과

□ 신규공종 적정성 여부 : 타당

□ 물량 증·감 공종 적정성 여부 : 적정

□ 단가적용 적정성 여부 : 적정

□ 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부 : 적정

Ⅴ		조 치 의 견

□ 상기 심의 결과를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 심의 결과 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 설계변경 내역서 1부.  끝.