문서번호	정수시설과-9994
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
배용우		정인영	11/20
			서한호
협 조

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(2023년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

(2023년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가))

『2023년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)』1~4차 작업 시행 중 신규 공종 발생 및 물량 증․감 등 변경사항에 대한 심의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 정수시설과-9971(2023.11.20.)호「설계변경 심의위원회 개최(2023년

뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가))」

□ 심의개요

ㅇ 심의일시 : 2023. 11. 20.(월) 14:00~15:00

ㅇ 심의장소 : 뚝도아리수정수센터 정수시설과

ㅇ 위원구성

- 위원장 : **********

- 위  원 : **********************************

□ 심의내용

ㅇ 설계변경 타당성 및 변경 계약금액 적정성 여부

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)
총부기금액	**********	**********	*
1차수계약금액	**********	**********	***********
2차수계약금액	**********	**********	***********

ㅇ 설계변경 내역에 대한 단가 산출 및 적용 적정성 여부

- 신규 공종 : GW-후렉시블(16C) 설치 등 20개 공종 발생

- 물량 증가 : 접지용전선(옥내, F-GV 35㎟) 설치 등 14개 공종 발생

- 물량 감소 : 접지동봉(Ф16×1800L 1본) 설치 등 199개 공종 발생

□ 심의결과

ㅇ 설계변경의 타당성 : 타당함

ㅇ 단가 산출 및 내역서 계산식 적정여부 : 적정함

ㅇ 제경비 요율 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정함

ㅇ 각종 제반 규정 준수여부 : 이상없음

ㅇ 기타 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 이상없음

□ 행정사항

ㅇ 상기 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

ㅇ 변경계약 후 작업지시(1~4차) 완료분 준공 처리

붙임 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의 의견서 및 심사결과 조정내역 1부.  끝.