문서번호	시설건설과-11139
결재일자	2023. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장
윤원영		이승우	11/20
			전태호
협조

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

사토장 변경(2차) 관련 실정보고 검토

2023. 11. 20.(월)

상수도사업본부

(시설부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」

사토장 변경(2차) 관련 실정보고 검토

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 윤원영☎1516

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 사토장 변경(2차) 관련 실정보고서 제출에 따른 검토결과를 보고드림.

□ 관련문서

ㅇ 서울시설공단 공사감독2처-14958(2023. 11. 16.)호 “현장실정 검토보고서 제출(10차)”

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사개요: *********************

ㅇ 공사기간: **************************

ㅇ 도 급 비: ***************

ㅇ 시 공 사: 에스디원건설㈜ 대표 백정주

ㅇ 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처

□ 감독기관 보고내용

ㅇ 토사반출 관련 1차 실정보고 내용(서울시설공단 공사감독2처-6485(2023. 6. 20.)호)

****************************************

*********************************************************************************************

*******************************************************************************************

***********************************************

ㅇ 영업기한 만료에 따른 사토장(2차) 변경계획

- 당    초: ******************************

- 변경(1차): ***************************

- 변경(2차): *******************************

*************************************************************************************************

- 운반거리 변경에 따른 신규단가 산출 시 변동(증가)있으나, 1차 변경과 동일 단가 적용

구분	공종명	규격	수량(㎥)	단가(원)	비고
**	**** *************	***********************	*****	******	단가변경없음
**	**** *************	*********************	*****	27.728

□ 검토의견

ㅇ 당초 수도권매립지 토사반입 불가 통보에 따라 사토장으로 1차 변경하여 잔토처리 하였으나, 사토장 계약기간 만료로 2차 변경하는 것은 타당

ㅇ 신규 사토장의 매립 허가상태, 부지면적 확보, 운반거리, 진입로 등은 사토장으로 사용하기에 적정하다고 판단됨

□ 행정사항

ㅇ 서울시설공단에 실정보고 승인 통보

붙임  실정보고 관련서류 각 1부.  끝.