아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약기간 연장의뢰[신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사]

1. 설비부-18361(2023.11.20)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사의 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 대상

계약건명 (계약번호)	계약자	차수	계약금액(원)	준공납품기한
				당초	변경(연장)
소방공사 (220223*******01)	(주)보성티엔씨	총차	966,272,200	2023.12.20.	2025.12.31.
		1차	40,000,000	2023.11.30.	2023.12.31.

나. 계약금액 : 변동없음

다. 연기사유 : 선행공종(건축) 지연에 따른 공사기간 연장

라. 지체상금 : 미부과

붙임  1. 합의서 1부.

2. 내부방침서 1부.

3. 건설사업관리단 공문 1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	김세익		도로설비과장	곽용길		설비부장	11/20
신용휴
협조자
시행	설비부-18403	(	2023. 11. 20.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2344	/전송	02-6438-2399	/	openland88@seoul.go.kr	/	부분공개(7)