문서번호	재난관리과-8353
결재일자	2023. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
소방교	구조팀장	재난관리과장		소방서장
이대명	정민석	이윤정		11/21
				윤영재
협 조

다목적 인명구조 훈련장 설계내역 변경 계획

.

2023. 11. 21.

구로소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

다목적 인명구조 훈련장 설계내역 변경 계획

구로소방서 다목적 인명구조 훈련장 설치공사 진행 중 폐기물처리비용 증가 및 공사장 펜스 변경 등 당초 공사에 대한 자재변경, 기타 변경사항에 따른 실정보고를 통한 설계내역 변경 계획임

Ⅰ		관련 근거

□ 재난관리과-3949(2023.06.09.)호 「다목적 인명구조 훈련장 설치공사 발주 계획」

□ 재난관리과-8244(2023.11.17.)호 「다목적 인명구조 훈련장 시공사측 실정보고서 접수 보고」

□ 구성2023-071호(2023.11.17.)호 「공사 실정 보고 건」

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 구로소방서 다목적 인명구조 훈련장 설치공사

□ 공사기간 : 2023. 7. 31. ~ 11. 31.

□ 시 공 사 : *******

□ 건축현황

구분	위치	연면적	건축높이	층수	구조	비고
다목적 인명구조 훈련장	구로구 경인로 408 (본서 주차장)	146.91㎡	14.5m	지상4층 (필로티구조)	철골조

□ 예산배정 및 집행현황 : **********  ********************

※2023.11.21.기준

구분(단위:천원)	배정예산	사용 세부내역		잔액
총 액	***********	***********		**********
시 설 비	***********	***********	*******************	**********
			********************
			*******************
			******************
			****************
			***************
감 리 비	*********	*********		*******
시설부대비	*********	*		*********

Ⅲ		실정보고사항

□ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제74조「설계 변경으로 인한 계약금액의 조정」

- 한마루건축사사무소23-감111701호 「실정보고 검토의견 제출의 건」

□ 설계내역 변경 사유

- 기초 설계 당시 미반영된 추가적인 물량 발생 및 훈련장 여건에

맞게 변경된 사항 적용

연번	기존	변경	사유
*	*******	*****	**************************** *********
*	****** ********	****	****
*	****************	************	*********
*	********	*********	*************************************************
*	***********	***********	*****
*	******	**	**
*	********	************	****
*	**************	**************	*****************************
		***************	*************
	**************	**	*****************************
	**************	**	*************************
*	**********	**********	****
**	***********	******	****
**	*****	*****	*******************************

□ 변경요청사항(건축공사)

Ⅳ		예산 현황

공 종	세부사항	변경전	변경후	증·감	비고
********	************* *********	*********	*********	*********
************	********** **********	*******	*******	********
*********	******** **********	**********	**********	*******
*************	******* *********	**********	**********	*********
*******	********* *******	*********	*********	********
************	***** *******	*********	*********	*******
*******	********	*********	*********	********
***********	********** ******* *******	*******	*********	*********
**		**********	**********	*********

□ 설계내역 변경 소요예산

□ 계약금액 변경

○ 내역변경 상 증가금액 *********** 산출

○ 증가된 금액 공사원가계산서 산출 결과 노무비 및 경비(산재

보험료, 고용보험료, 국민건강보험료 등) 원가계산서 상 최종

총공사비 ************ 증가됨

공정	변경전 계약금액	증가내역	변경후 계약금액	비고
계	***********	***********	***********

□ 산출결과 설계내역 변경 금액

Ⅴ		감리검토

□ 시공사 ㈜구성이엔드씨 실정보고서 검토 결과 ‘적합’

현장협의(협의 및 요청)에 의한 물량증감(금액증감)으로, 변경된

내역서에 따라 변경함이 타당함

○ 각 공종별 증감내용을 검토결과 증감물량이 타당

○ 신규품목의 금액에 대하여 견적서(표준품셈과 일위대가)를 적용 및 계산

○ 설계변경 총공사비(직접비) 증가. 간접비는 요율에 따라 별도 적용

Ⅵ		추후일정

□ 상기와 같이 설계내역 변경에 대하여 설계자 및 시공사 등 의견과

회계부서 협조 실정보고 사항에 대하여 검토한 바, 설계내역 변경

시공하는 것이 적정하다고 판단됨

□ 설계내역 변경사항 장비회계팀 내역변경 계약의뢰 후 처리 예정

□ 준공예정일자(2023. 11. 27) 도래 감안하여 시공사측 준공계 확인

및 선급금·기성금 서류 및 준공정산 처리 시행 예정

붙임  1. 공사 실정보고 공문 1부.

2. 설계내역 변경 관련 자료 1부.  끝.