아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	강북구청장(문화관광체육과장)
(경유)
제목	전통사찰 시설확충 및 정비지원 사업기간 변경 승인 알림

1. 강북구 문화관광체육과-37329(2023.11.15.)호 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 강북구 도선사의 「축대 및 주변시설 정비」사업기간 변경 신청 건에 대하여, 아래와 같이 승인하오니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내용

- 사업기간 변경

당초			변경
설계	착공	준공	설계	착공	준공(예정)
23.7.	23.10.	24.7.	23.10.	23.11.	24.12.

- 변경사유 : 총사업비의 규모가 큼에 따라 사찰 자체가 아닌, 조계종 본단의 보수업체선정위원회 개최 등으로 사업자 선정 지연  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	범종혁		종무팀장	김용환		문화정책과장	전결 11/21
전재명
협조자
시행	문화정책과-16738	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	04520	중구 세종대로 124, 한국프레스센터 4층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2523	/전송	02-2133-1059	/	qjawhd77@seoul.go.kr	/	대시민공개