문서번호	환경녹지과-8550
결재일자	2023. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
녹지관리팀장		환경녹지과장	서부공원여가센터소장
정동열		강병기	11/21
			이용남
협조

2023년 월드컵공원 위험수목제거공사 설계변경 및 정산계획

2023.  11.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

2023년 월드컵공원 위험수목제거공사 설계변경 및 정산계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리 센터「2023년 월드컵공원 위험수목제거공사」와 관련하여 현장여건에 따른 일부 공종·물량변경에 따른 설계변경 및 계약상대자가 사용하지 않은 연금보험료 등 제경비를 정산하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 월드컵공원 위험수목 제거 공사

ㅇ 위    치 : 서울시 마포구 상암동 481-94 일대

ㅇ 사업내용 : 위험수목 40그루 제거

ㅇ 공사기간 : 2023. 02. 06. ~ 2023. 11. 30.

****************************

**********************

Ⅱ		실정 및 설계변경 검토보고

□ 위험수목 제거 물량 감(당초 40주 → 28주, 감 12주)

ㅇ 태풍 등으로 피해목이 발생할 수 있어 연간단가 계약을 추진한 본 공사에 대하여 제거 대상목을 선정한 결과 당초 계획된 물량보다 제거 대상목이 적음에 따른 물량 감소

□ 수목 강전정 물량 신규 발생(당초 0주 → 55주, 증 55주)

ㅇ 한국지역난방공사 중앙지사고객지원부-2803호(2023.10.26.)「한국지역난방공사 중앙지사 상암열원 북서측 사면 위험수목 제거 요청」에 따라 현장확인 결과 위험수목은 제거하고 쓰러질 우려가 있는 적은 수목은고압설비 시설보호를 위하여 강전정이 필요함에 따른 신규 물량 발생

□ 건강보험료·연금보험료 등 제경비 정산

ㅇ 설계(공종 및 물량) 변경에 따른 간접노무비 등 제경비 정산

- 간접노무비·산재보험료·고용보험료·기타경비·일반관리비 증, 이윤 감

ㅇ 당초 설계에 계상되었으나 가입하지 않은 보험료 정산

- 건강보험료·연금보험료·노인장기요양보험료 감

ㅇ 당초 설계에 계상되었으나 미사용 또는 감액 사용한 제경비 정산

- 환경보전비·건설기계대여대금 감

****************************************

********

******	****	****	*********	****
*****	**********	**********	*

Ⅲ		향후계획

ㅇ 설계변경 및 정산 시행

ㅇ 시민 안전 및 건설공사 품질향상을 위하여 현장관리 철저 등

붙임  1. 공사비 증감 대비표 1부.

2. 설계변경 사유 및 물량증감내역 1부.

3. 변경설계서 1부.

4. 계약금액조정 검증(기술심사담당관)확인서 1부.

5. 보험료 등 정산서류 각 1부.  끝.