아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장(강남전력지사장)
(경유)
제목	대모지하차도 개포전력구 배전선로 이설 일정 변경 요청 회신

1. 강남지(배전)-1195(2023.11.14)호와 관련입니다.

2. 「양재대로 구조개선사업」은 강남순환로 ~ 수서IC간 연속류 확보로 양재대로, 헌릉로 등 주요 간선축의 원활한 교통소통을 위해 우리 시에서 '25.12월 개통목표로 추진 중인 역점사업입니다.

3. 귀 공사의 개포전력구 배전선로 이설 일정 변경('23.12월초 이설 완료 → '24.1월 이후 착공) 요청은 대모지하차도 개통 지연에 따른 많은 시민의 피해가 예상되는 바, 수용하기 어려운 사항입니다.

4. 본 공사의 공기가 촉박한 실정임을 감안하여 사업이 원만히 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노승환		토목설계과장	박운용		토목부장	11/21
이임섭
협조자	주무관	이나영
시행	토목부-21642	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 토목부 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2163	/전송	02-6438-2199	/	roh9595@seoul.go.kr	/	부분공개(5)