문서번호	환경녹지과-8548
결재일자	2023. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
녹지관리팀장		환경녹지과장	서부공원여가센터소장
정동열		강병기	11/21
			이용남
협조
	운영팀장		고봉채

2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무갖기공사 준공기한 연기 검토보고

2023.  11.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무갖기공사 준공기한 연기 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리 센터「2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무갖기공사」와 관련하여 민간협력단체 플랫품 구축 미흡으로 시민참여로 지급되는 수목이 2024년 봄철에 가능할 것으로 예상되어 불가피하게 준공기한을 연기하고자 보고 드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 난지천공원 및 문화비축기지 내나무갖기공사

ㅇ 대 상 지 : 2개소(난지천공원 1, 문화비축기지 1)

ㅇ 면    적 : 약 1,602㎡(난지천공원 1,022, 문화비축기지 580)

ㅇ 사업내용 : 느티나무외 5종 50주, 황금사철외 9종 3,370주, 보행매트 108m

- 난지천공원 : 느티나무외 3종 38주, 황금사철외 7종 3,250주, 보행매트 108m

- 문화비축기지 : 이팝나무외 1종 12주, 수수꽃다리외 1종 120주

ㅇ 공사기간 : 2023. 11. 16. ~ 12. 10.(25일)

*******************************

**********************

***********************

□ 준공기한 연기 검토

ㅇ 민간협력단체 플렛폼 구축 미흡으로 준공기한 연기 필요

- 본 공사는 민간협력(서울시+협력단체) 실행 체계 구축 및 협업으로 추진되는 공사로 시민참여로 지급되는 수목을 확보하기 위한 플렛폼 구축 지연

************************************************************************************************************************

*********

******	*****	*****	****
****	*************	*************	****

***********

******************************************************************************************************************************************************************

*****************

□ 향후일정

************************************************

ㅇ 2024. 03.~04. : 공사시행 및 준공

※ 민간협력단체 수목 공급 일정에 맞추어 공사시행 예정

□ 기타사항

ㅇ 민간협력단체 수목 공급이 가능한 시기에 공사를 시행할 수 있도록 계약상대자와 사전 협의 완료

ㅇ 천만시민이 정원문화를 누리고, 녹색 활력이 넘치는 정원도시 서울 조성

붙임 : 합의각서 1부.  끝.