문서번호	시설보수과-10084
결재일자	2023. 11. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		임형규	11/21
			이경우
협 조
	주무관			김승진
	주무관			김재윤

예비준공검사 실시계획 2023년도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11월

강서도로사업소

(시설보수과)

예비준공검사 실시계획 "2023년도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)"

2023년 예산사업으로 시행중인 "2023년도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)"에 대한 예비준공검사를 실시하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

예비준공검사 개선대책【기술심사담당관-10127호(2018.6.29.)】

○ 검사대상 : 감독권한대행 등 건설사업관리시행공사

○ 안전관리계획 수립 대상 공사(시특법상 1·2종 시설물 등)

○ 시행시기 : 준공 2개월전

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : "2023년도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등)"

시 공 사 : 라보산업㈜  대표 이예슬

공사기간 : 2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31

주요공종 : 교면보수공 34a, 방수공 1,090㎡, 신축이음보수 98m 등

도 급 액 : 금1,393,707,000원

공 정 율 : 93%

Ⅲ		예비준공검사 계획

검사일 : 2023. 11. 22(수) 14:00

검사자 : 시설보수과 김규춘외 2명, 현장대리인

검사내용

○ 주요공종 전반에 대한 시공상태 등 하자발생 여부 점검

Ⅳ		향후계획

예비준공검사조서 작성

○ 검사결과 지적사항에 대하여 준공 전 완료조치 토록 시공사 통보

2023. 11월 : 폐기물 반출등 잔여공종 추진

2023. 12월 : 설계변경 및 준공

따로붙임  예비준공검사조서 1부.  끝.