서울의 중심, 청렴의 중심 종로
		종 로 구
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기 시행(2023년 골목길 스마트 보안등 설치 사업)

우리 구에서 시행중인「2023년 골목길 스마트 보안등 설치 사업」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2023년 골목길 스마트 보안등 설치 사업

2. 계 약 자 : 경광테크(주)

3. 도 급 비 : 금156,132,950원(금일억오천육백일십삼만이천구백오십원)

4. 공사기간 : 2023. 08. 04. ~ 11. 30.

5. 준공기한 연기

가. 당  초 : 2023. 08. 04. ~ 11. 30.

나. 변  경 : 2023. 08. 04. ~ 12. 20.

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 사    유 : 기존 계약물량 대비 시공물량 증가 및 공사 기간중의 장마, 폭염으로 인한 공사기간 부족

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.
2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	이수연		도로조명팀장	송성호		도로과장	김세율		건설교통국장	11/21
권기욱
협조자	주무관	변정은		계약팀장	조양희		재무과장	김한라
행정국장	김승근
시행	도로과-28663	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	03152	서울특별시 종로구 종로1길 36	/	https://www.jongno.go.kr
전화	02-2148-3193	/전송	02-000-0000	/	esusu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)