문서번호	급수운영과-19233
결재일자	2023. 11. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최박		김종섭	11/22
			이규희
협조

현장실정 보고

(올림픽로 장기사용 배수관 정비공사-리센츠아파트앞)

2023. 11.

강동수도사업소

(급수운영과)

「2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사」

현장실정 검토보고

「2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 서울시설공단으로부터 실정보고가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

공사 현황

○ 공사명: 2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사(리센츠아파트앞)

○ 공사개요: 송배수관 정비 D=200〜900㎜, L=972m

○ 공사기간: 2023. 5. 8.~2024. 1. 1.

○ 계약금액: 1,703,546,500원

○ 시공사: (주)효림이엔지  대표 임거로

○ 감독자: 서울시설공단 공사감독2처 조남명

※ 관련문서: 공사감독2처-15150(2023. 11. 20.)

Ⅱ		현장실정 보고내용

현황 및 문제점

○ 잠실새내역 사거리 기존관이 GIS도면과 상이하여 L형측구 밑으로 매설되어 있고, 기존관 철거를 위한 터파기시 L형 측구 및 보차도경계석, LED바닥형 보행신호등이 탈락됨.

○ 기존 포장살태가 불량하고 기존관 심도 약 2m에 매설되어 기존관 철거시 일부 포장면이 탈락되어 안전사고 등이 우려가 됨.

시설공단 검토의견

○ 기존관이 L형측구 밑으로 매설되어 있고 경계석 등 탈락에 의한 안전사고를 사전에 예방하고자 L형측구 및 보차도 경계석, LED형 보행신호등을 철거 후 재설치하고자 함.

○ 설계도상 굴착폭이 1.8m으로 되어 있으나, 기존 포장면 상태를 고려 1.8~약3.8m로 철거하여 신설과 시공중 기존 아스팔트 탈락에 의한 안전사고를 미연에 방지하고자함

○ 개략공사비 증감

공종	당초	변경	개략공사비
아스팔트깨기증가		약) 100㎥	증) 1,517천원
LED바닥형 보행신호등		22개	증) 7,304천원
개략공사비			증) 8,875천원

Ⅲ		사업소 검토의견

기존관(D900) L형 측구 밑으로 매설되어 있어, L형측구 및 보차도경계석, LED형 보행신호등을 철거 후 재설치하고, 기존 포장면의 상태가 불량한것을 고려하여 1.8m~3.8m로 철거하여 공사하는 것이 안전사고를 미연에 방지하는 것이라고 판단 됨.

Ⅳ		조치계획

상기 사항을 서울시설공단에 통보하고 향후 설계변경에 반영토록   회신하고자 합니다.

붙임  공사 실정 검토보고 1부.  끝.