아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 (낙성대가03-03 소블록 배수관 세척 용역)

우리 사업소에서 시행중인 「낙성대가03-03 소블록 배수관 세척 용역」에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 낙성대가03-03 소블록 배수관 세척 용역

나. 계 약 자 : **************

다. 계약기간 : 2023.04.18. ~ 2023.11.30.

라. 용역개요

구 분		금 액 [원]		증·감
		당 초	변 경
용역비	공급가액	***********	***********	*	**********
	부가가치세	**********	**********	*	*********
	총 계	***********	***********	*	**********

- 당 초) 배수관 D80~300mm, L=6,234m / 맥동류세척

- 변 경) 배수관 D80~300mm, L=6,385m / 맥동류세척

마. 설계변경 내역

바. 설계변경 사유 : 공종별 물량 증·감 및 신규공종 반영

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비 (소블록 배수관 세척 41201)

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.
2. 설계변경 심의 결과보고 1부.
3. 설계변경 심의의결서 1부.
4. 설계변경 합의서 1부.  끝.

주무관	김윤선		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	이용구		남부수도사업소장	11/21
김분숙
협조자	주무관	공보라		행정지원과장	홍기관
시행	급수운영과-18809	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4559	/전송	02-3146-4589	/	ysys05@seoul.go.kr	/	부분공개(5)