아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공 설계변경 시행 및 계약변경 의뢰 - 남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

우리 사업소에서 시행 중인 「남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업」건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 남산3호터널 풍도 전기설비 개량사업

나. 계약기간 : 2023. 7. 25. ~ 2023. 11. 21.

다. 계약업체 : 백양이엔씨 (대표 한승환)

라. 계약금액 : 금678,140,350원

라. 변경사유 : 준공에 따른 물량 변경, 보험료 정산 등

마. 변경사항

구 분		공 사 비(원)			증 감 (D = C-A)	비 고
		변 경 전 (A)	변 경 (사후정산 제외) (B)	최종 변경 (사후정산 포함) (C)
도급액	공급가액	616,491,228	565,415,455	536,830,000	감) 79,661,228
	부가세	61,649,122	56,541,545	53,683,000	감) 7,966,122
	도급비계	678,140,350	621,957,000	590,513,000	감) 87,627,350

※ 설계변경 검토보고 내역에서 "국민연금, 건강, 노인장기 보험료"에 대한 사후 정산

반영하여 최종변경 금액 산출

- 국 민 연 금 : 10,929,404원   ->  1,476,250원  (감 9,751,228원)

- 노인장기요양 :  1,400,056원   ->     187,340원  (감 1,250,899원)

- 건강보험료 : 13,873,715원   ->     863,540원  (감 13,388,548원)

바. 예산과목 : 서부도로사업소 기전과, 도로시설관리, 기전시설물관리,

도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고 1부.
2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.
4. 제비율검증확인서 1부. 끝.

	기 전 과 장
주무관	곽영두		기전과장	11/21
최경주
협조자
시행	기전과-14352	(	2023. 11. 21.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	youngdoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)