아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 (2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인「2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사」의 준공기한이 연기됨에 따라 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

나. 공사개요: *******************

다. 계 약 자: *****************

라. 계약기간

1) 당  초: 2023. 05. 02. ~ 2023. 11. 30.

2) 변  경: 2023. 05. 02. ~ 2023. 12. 22.

마. 계약금액: *******************

바. 연기사유: ***********************

사. 지체상금 부과 여부: ***

아. 하자기간: 준공검사일로부터 3년

붙  임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 검토 보고서(서울시설공단) 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	손성우		급수운영팀장	신중선		급수운영과장	11/22
박종일
협조자
시행	급수운영과-20506	(	2023. 11. 22.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-)3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	부분공개(5)