문서번호	토목부-21920
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		代이회진	11/23
			이임섭
협조

- 창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 - 실정보고(접속슬래브 규격 변경) 검토 보고

- 창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(접속슬래브 규격 변경) 검토 보고

2023. 11.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사 -

실정보고(접속슬래브 규격 변경) 검토 보고

「창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사」인접공사 간섭으로 인한 접속슬래브 규격 변경 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 보행교 실정보고 검토보고(창동상계 제23-259호, 2023.11.22.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 창동상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

ㅇ 공사규모 : 보행교 신설(연장 110.5m, 폭 10m)

ㅇ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18.(2차 : '22.10.17. ∼ '23.10.16.)

ㅇ 도 급 비 : *************************

ㅇ 시 공 사 : *********

ㅇ 감 리 사 : *************

□ 추진 경위

ㅇ '23.08.16. : 접속슬래브 설치 관련 인접 현장 합동회의(보행교, 창동-상계 지하차도)

- 지하차도 CIP와 보행교 A2 접속슬래브가 간섭되어 공정계획 및 접속슬래브 규격 축소 등 검토 필요

ㅇ '23.09.~11. : 창동 상계 지하차도 CIP 및 캡빔 설치

ㅇ '23.11.07. : 지하차도 공사 간섭에 따른 접속슬래브 축소 원설계자 의견 회신

- 보행교로 차량 하중이 없음에 접속슬래브 축소하여도 문제 없음

ㅇ '23.11.09. : 접속슬래브 설치 관련 인접 현장 합동회의(보행교, 창동-상계 지하차도)

- 보행교 접속슬래브와 지하차도 CIP 파일의 이격 거리 등 시공방안 최종 협의

ㅇ '23.11.    : 기술지원기술인(구조, 토질) 접속슬래브 축소 검토의견 회신

- 교대와 CIP가 구속 형태를 형성하여 부등침하 문제 없을것으로 판단됨

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ A2 접속슬래브 규격 축소 - A2 접속슬래브와 창동 상계 지하차도 현장 CIP파일이 간섭되어 접속슬래브 규격을 축소하여 시공하고자 함 ******************************************************

ㅇ 현안 사항

- 보행교 A2 접속슬래브와 "동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사"의 CIP 파일이 간섭되어 시공이 불가함

<평면도 및 단면도>

평 면 도	단 면 도

ㅇ 검토 내용

- 간섭으로 인한 접속슬래브 규격 축소에 대해 원설계자, 기술지원기술인 의견을 검토한 결과 접속슬래브 규격(내민 길이)을 축소하여도 교대 뒷채움부의 부등침하 문제가 없을 것으로 의견 회신

◆ 원설계자 의견

- 보행교는 사람 이동이 주 목적임에 접속슬래브 부분에 대한 충격이 미미함으로 규격 축소 가능

◆ 기술지원기술인(구조, 토질) 의견

- 차량이 통행하지 않는 보행교량이며, 교대 뒷채움을 철저히 한다면 CIP 파일과 교대가 구속상태를 형성하여 부등침하 문제가 없을 것으로 판단됨

ㅇ 접속슬래브 규격 변경

- 접속슬래브 내민 길이를 지하차도 CIP와 20cm 이격하여 규격 축소

※ 이격 거리는 창동상계 지하차도 현장과 협의

- 규격 변경 : ********************************************

<접속슬래브 간섭구간 평면도>

당 초 (B=3.0m)	변 경 (B=1.74m)

<접속슬래브 간섭구간 단면도>

당 초 (B=3.0m)	변 경 (B=1.74m)

ㅇ 주요수량 증·감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
콘크리트타설(철근)	㎥	18	11	△ 7
콘크리트타설(무근)	㎥	4	2	△ 2
유로폼(벽체)	㎡	9	8	△ 1
스페이셔설치(수평)	㎡	41	23	△ 18
콘크리트 피막양생	㎡	49	32	△ 17
철근가공/조립	ton	1.703	1.067	△ 0.636
고철	kg	54	44	△ 10
철근운반(공장)	ton	1.757	1.102	△ 0.655
철근운반(가공공장)	ton	1.703	1.067	△ 0.636
레미콘(25-18-150)	㎥	4	2	△ 2	관급자재
레미콘(25-30-150)	㎥	18	11	△ 7	관급자재
이형철근(D16)	ton	1.256	0.774	△ 0.482	관급자재
이형철근(D13)	ton	0.433	0.260	△ 0.173	관급자재

ㅇ 공사비 증·감 : 감) *******                       (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증⦁△감	비 고
1. 구조물공	*****	*****	*******
직접공사비계	*****	*****	*******
제경비	*****	***	*******
공급가액	*****	*****	*******
부가가치세	***	***	*******
도급공사비	*****	*****	********
관급자재비	*****	*****	********
총공사비	*****	*****	********

□ 조치 계획

ㅇ 인접공사 CIP파일과의 간섭으로 인한 접속슬래브 규격 축소 실정보고 내용은 적정한 것으로 판단되어 향후 설계변경에 반영하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 공기연장 검토보고서 1부.  끝.