문서번호	시설관리과-21408
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장
배진원	홍정식	11/23
		문병희

설계변경(1회, 최종) 심의위원회 개최 결과 보고

(2023년 개포공동구 대체관로 구축공사)

2023. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

설계변경(1회, 최종) 심의위원회 개최 결과 보고

우리 사업소에서 시행중인『2023년 개포공동구 대체관로 구축공사』에 대하여 시공물량 증감 등으로 설계변경 사유가 발생하여 설계변경(1회, 최종) 심의위원회를 개최하고 결과를 보고드림

□  공사 현황

□ 공 사 명: 2023년 개포공동구 대체관로 구축공사

□ 공사개요: D100 ~ 600mm, L=475m

□ 공사기간: 2023.5.3. ~ 2023.11.28.

□ 도 급 액: ************

□ 도 급 자: (주)남경씨엔아이 대표 오장근

□  설계변경 사유

□ 제경비 등 실 사용에 따른 정산

연번	구분(제목)	주요 변경내용	비고
1	*************	************************ **************************
2	***********	********************************

□ 주요 공종 변경에 따른 정산

공종	규격	단위	당초	변경	증감	비고
하수도 복구공	************	*	**	*	****
배급수관 부설	****************	*	***	***	****
주철관(이형관)부설공	**********	**	***	**	****
주철관(이형관)부설공	**********	**	**	**	****
K.P 이탈방지압륜 접합	**********	**	***	**	****

□  설계변경으로 인한 계약금액 조정

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증․ 감
도 급 비	***********	***********	************
공급가액	***********	***********	************
부가가치세	**********	**********	***********

□  설계변경(1회, 최종) 심의 개최 결과

❍ 심의 개요

- 개최일시: 2023.11.23.(목) 14:00

- 개최장소: 시설관리과 사무실

- 심의위원

• ***********

*•******************************************************************

- 심의내용: ***********************

❍ 심의 결과: ***

□  조치 계획

❍ 상기 심의결과를 반영하여 설계변경(1회, 최종) 시행하고자 합니다.

붙임  설계변경(1회, 최종) 심의 의견서 1부.  끝.