문서번호	기전설비과-4220
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
이재돈		11/23
		김진보
협조

마포종점나들목 공연 휴게공간 조성 전기공사

관급자재 납품기한 변경 검토 보고

2023.11.23.(목)

미래한강본부

(기전설비과)

마포종점나들목 공연 휴게공간 조성 전기공사

관급자재 납품기한 변경 검토 보고

본부에서 추진중인「마포종점나들목 공연 휴게공간 조성 전기공사 관급자재 납품시기가 도래하지 않아 납품기한을 변경하고자 보고함.

Ⅰ		계 약 현 황

사업명	납 품 요구번호	계약자	품 명	계약금액 (원)	납품기한
LED경관조명기구 외 3종 (마포종점나들목 공연 휴게공간 조성 전기공사)	************* ***	****	********	*******	***** *****
	****************	*****	***** ****	**********	***** *****
	****************	*****	****	*******	***** *****

Ⅱ		납품기한 변경 내용

○ 변경사유

- 관급자재 납품시기가 도래하지 않아 납품기한 연기

○ 납품기한 변경

- 당 초 : 2023.11.30.

- 변 경 : 2024. 3.31.

Ⅲ		행 정 사 항

○ 관급자재 납품기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(총무과)

붙 임 1. 납품기한 연기 합의서 3부.

2. 분할 납품 요구서(당초) 3부.  끝