문서번호

치수과-23340

주무관

하수팀장

치수과장

안전건설교통국장

서민석

천범석

이형순

11/23

등록일자

결재일자

2023. 11. 23.

박승일

공개여부

부분공개(5)

협 조

예산팀장

권미정

- 남정초등학교 주변 외 1개소 하수관로 개량공사 -

설계변경(1회) 시행계획 검토보고

2023.11.

용  산  구

(치 수 과)

용 산 구
□ 사 전 검 토 사 항
※ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시 후 검토사항을 기입하시기 바랍니다.
구분	사전 검토항목 점검 사항
법령검토	◆	법령규정	:	검토 ■ (법규명 : 지방계약법 )						무□
	◆	공직선거법	:	검토 □ (저촉여부 : )						무■
재원확보	◆	예산확보	:	구비 ■ 시비 □ 국비 □ 기타 □ ( )						무□
절차검토	◆	처리절차	:	투융자심사		□	용역심사 □			무■
				공유재산심의		□	기타 □ ( )
기관협의	◆	관계기관	:	중앙 □ 서울시 □ 기타 □ ( )						무■
	◆	관련부서	:	유 ■ (부서명 : 기획예산담당관, 재무과 )						무□
	◆	기타(민간단체등)	:	유 □ (단체명 : )						무■
소통분야 고려사항	◆	주민소통	:	구민 □ ( ) 직능단체 □ ( )						무■
	◆	이해당사자	:	유 □ ( )						무■
	◆	전문가	:	유 □ ( )						무■
홍보계획	◆	홍보수단	:	포스터	□	리플릿		□	기자 설명회 □	무■
				홈페이지	□	보도자료		□	디지털게시판·승강기 □
				SNS	□	소식지		□	기타 □ ( )
사전고려 사항	◆	기타사항	:	갈등발생 요인 □ 사회적 약자 배려 □ 취약계층 □						무■
				성차별적요소 □ 일자리 □				안전성 □ 유지비용 □
여성친화도시조성	◆	여성친화도시 사업목표	:	양성평등정책 기반 구축 □				여성의 경제·사회참여 확대 □		무■
				안전증진 □ 가족친화 □				여성의 지역사회 활동역량 강화 □
타 기관 사례	◆	운영사례	:	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?						무■
				( · )

- 남정초등학교 주변 외 1개소 하수관로 개량공사 -

설계변경(1회) 시행계획

『남정초등학교 주변 외 1개소 하수관로 개량공사』 관련 기 보고내용을 토대로 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남정초등학교 주변 외 1개소 하수관로 개량공사

○ 공사기간 : 2023.08.18. ~ 2023.11.30.

○ 도 급 비 : 295,294,310원

○ 도 급 자 : (주)다홍건설 대표 한준희

○ 공사규모 : 하수관로 개량 D450~700mm, L=243m

○ 공 정 률 : 95%

남정초등학교 주변	장미아파트 주변

□ 추진현황

○ 2023.07.26. : 공사발주

○ 2023.08.17. : 공사계약

○ 2023.08.18. : 공사착공

□ 설계변경(1회) 시행

○ 현안사항(1회) 검토 및 조치계획(치수과-15791,2023.09.14.) 반영

- 공사 대상지 주변 민원에 따른 굴착공사 시행불가(원효로64길 17~34 구간, 굴착개량 → 비굴착보수 공법 변경)

- 맨홀 추락방지시설 설치

○ 현안사항(2회) 검토 및 조치계획(치수과-21270,2023.10.16.) 반영

- 공사 인접지역 노후·불량 하수관로 추가개량

○ 실정보고(1회) 검토 및 조치계획(치수과-22595,2023.11.09.) 반영

- 사토장 변경

○ 기타 제경비 정산(증·감) 반영

□ 설계변경 시행

○ 계약금액 조정내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증·감)
총 공사비		451,054,310	499,576,420	증)48,552,110
도급비	공급가액	268,449,373	368,154,546	증)99,705,173
	부가가치세	26,844,937	36,815,454	증)9,970,517
	계	295,294,310	404,970,000	증)109,675,690
관급자재비		56,387,320	50,760,000	감)5,627,320
이전비 및 기타		99,372,680	43,846,420	감)55,526,260

○ 예산조치 : 본 사업의 낙찰차액 및 이전비 등 집행잔액 활용

[예산현황]

(단위 : 천원)

총사업비	도급비	관급자재비	이전비	기 타 (낙찰차액 등)
500,000	295,294	56,387	99,372	48,947

- 예산과목 : 치수과, 하수도관리 및 치수방재, 하수도관리, 남정초등학교 주변 외 1개소 하수관로 개량(교부세), 시설비 및 부대비, 시설비(특교세)

□ 향후계획

○ 2023. 11. : 설계변경 및 공사준공

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증표 1부.

3. 관련 방침서 3부.

4. 계약원가심사 결과통보 1부.  끝.