문서번호	교통행정과-102041
결재일자	2023. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
이준상		심재호		이진영		11/23
						신용철
협조	재무과장		代이원용
	예산팀장		박영수
	계약팀장		황미란
	주무관		설태연

2023년 교통안전시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경(제1회) 시행보고

- 2023년 교통안전시설물 유지보수공사(단가계약) -

설계변경(제1회) 시행보고

2023. 11.

(교통행정과)

- 2023년 교통안전시설물 유지보수공사(단가계약) -

설계변경(제1회) 시행보고

우리 구에서 『2023년 교통안전시설물 유지보수공사(단가계약)』시행 중 공사물량 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 2023년 교통안전시설물 유지보수공사(단가계약)

❍ 위    치 : 성동구 관내

❍ 공사기간 : 2023. 3. 15. ~ 2023. 12. 31.

❍ 공사규모

- 교통안전표지판 정비: 173매

- 도로부속시설물(반사경, 볼라드, 시선유도봉 등) 정비: 119개소

❍ 공 사 비 : 70,213,120원 (도급비 70,213,120원)

❍ 계약상대자 : 제일전기 대표 홍순식

Ⅱ		예산 현황

구분	예산과목	예산
구비 (본예산)	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 교통안전시설물 설치 및 관리, 시설비(401-01)	61,610천원
시비 (재배정)	교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전 시설물관리, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비(401-01)	19,000천원
합 계		80,610천원

❍ 현재 예산

❍ 추가 예산

구분	예산과목	예산
시비 (재배정)	보행자전거과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이용편의 증진, 어린이 안전 영상정보 인프라 구축, 시설비(401-01)	3,000천원
구비 (추경)	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 교통안전시설물 설치 및 관리, 시설비(401-01)	23,700천원
구비 (추경)	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 어린이(노인)보호구역 개선, 시설비(401-01)	20,000천원
합 계		46,700천원

Ⅲ		설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 주민 민원사항 등에 따른 공사물량 증 ‧ 감

- 보호구역 확대지정(금호초,옥수초), 어린이승하차구역 확대설치, 어린이보호구역 개선(구비추경) 등 시행에 따라 표지판 등 교통안전시설물의 신속한 정비를 위해 연간단가 공사 활용.

☞ 관련근거

보호구역 확대지정[교통행정과-40508호(2023.5.15.)]

어린이보호구역 개선사업[2023년 추경예산]

어린이승하차구역 확대설치[市보행자전거과-7934호(2023.5.31.)]

❍ 설계변경 금액

- 부족한 예산 57,096,880원은 낙찰차액 10,081,880원, 집행잔액 315,000원, 시비재배정예산 3,000천원, 구비(추경) 43,700천원을 추가하여 총 예산 127,310천 원으로 사업 추진

구 분	예산액	도급비	낙찰차액	집행잔액
변경 전	80,610,000원	70,213,120원	10,081,880원	315,000
변경 후	127,310,000원	127,310,000원	0원	0원
증 · 감액	46,700,000원	57,096,880원	- 10,081,880원	- 315,000원

❍ 주요 변경내용

- 교통안전표지판 정비

·173개 → 283개 등

- 교통안전관련 도로부속시설물(반사경, 볼라드, 시선유도봉 등) 정비

·119개소 → 588개소

-‘어린이보호구역 안전펜스’등 신규 일위대가 추가

-‘보행자안내표지판 철거' 등 신규 일위대가 추가

-‘도로안전시설물 및 도로부속물' 등 신규 일위대가 추가

Ⅳ		조치 계획

❍ 공사 시행에 따른 변경사항에 대하여 상기와 같이 설계변경을 시행하고 관내 교통안전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 관련공문 각 1부.