아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약기간 연장의뢰(서울사진미술관 건립 기계공사 - 관급자재)

1. 설비부-18515(2023.11.22.)호와 관련입니다.

2. 서울사진미술관 건립 사업과 관련하여 기계공사에 소요되는 관급자재의 계약기간을 아래와 같이 연장해 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 대상(총1건)

계약번호 (납품요구번호)	계약명 (계약상대자)	계약금액(원)	준공(납품) 기한
			당 초	변 경
****************	************************ *******	********** *********	**********	*********

나. 계약금액 : 변동없음

다. 연기사유 : 선행공종(건축) 준공기한 연장에 따른 관급자재 투입시기 조정

라. 지체상금 : 미부과

붙임 : 방침서 및 합의서 각1부.  끝.

	설 비 부 장
주무관	이상록		도로설비과장	곽용길		설비부장	11/23
신용휴
협조자
시행	설비부-18667	(	2023. 11. 23.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2342	/전송	02-6438-2399	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(7)