문서번호	시설보수과-10207
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		임형규	11/24
			이경우
협조
	주무관		김규춘

「2023년 도로시설물 일상유지보수공사-터널,복개등」

예비준공검사 결과보고

2023. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

「2023년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개등)」

예비준공검사 실시계획

2023년 예산사업으로 시행중인『2023년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개등)』에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과르 보고 드림

관련근거

○ 예비준공검사 개선대책(기술심사담당관-10127(2018.6.29.)

- 검사대상

· 감독권한대행 등 건설사업관리 시행 공사

· 안전관리계획 수립 대상 공사(시특법상 1·2종 시설물 등)

- 주 체 자 : 발주청 및 책임감리원 → 발주청으로 변경

- 시행시기 : 준공 2개월전(주요공정 완료 후 예비준공검사 실시)

공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개등)

○ 도 급 사 : ㈜제이엠종합건설 대표 이정민

○ 공사기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.

○ 도 급 액 : 802,151,800원

○ 주요공종 : 아스콘포장 27a, 신축이음 148m, 상판보수공 105㎡,

콘크리트보수공 1,461㎡, 강재보수공 362개소, 기타 1식

○ 공 정 율 : 95%

예비준공검사 결과

○ 검사일자 : 2023. 11. 22.(수) 14:00

○ 검 사 자 : 시설보수과 시설6급 김승진, 시설7급 김규춘

○ 검사내용

- 작업지시1~5차 작업완료 보고된 주요공종 적정시공 여부

- 표면보수, 낙하방지망 설치, 재포장, 재도색 등

○ 검사결과 : 적정시공(특이사항 없음)

○ 주요 점검사진

작동터널 표면보수(2차 작업완료)	궁동터널 낙하방지망 설치(2차 작업완료)
서부트럭터미널앞지하차도 재포장 및 차선도색(3차)	화곡터널 벽체 재도색(4차 작업완료)

향후계획

○ 2023. 11월 : 잔여공종 등 시행

○ 2023. 12월 : 설계변경 및 준공

따로붙임 : 예비준공검사조서 1부.   끝.