문서번호	기전과-12648
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
박준규	11/24
	김병용

(양천구 보행신호 보조장치 설치사업)

교통안전시설물(신호)원인자공사

추가 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  11.

강서도로사업소

(기전과)

양천구 보행신호 보조장치 설치사업

교통안전시설물 원인자공사 승인 검토보고

사업소장 : 이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 : 박준규☎7963

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사의 승인요청을 검토하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 양천구 보행신호 보조장치 설치 관련 원인자공사 추가 승인 및 공기연장 요청

ㅇ 양천구청 교통행정과-97069(2023.11.7.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 양천구 보행신호 보조장치 설치사업

□ 원 인 자 : 양천구청 교통행정과

□ 공사위치 : 양천구 목동중학교 등

□ 공사내용 : 바닥신호등 및 제어기 설치 등

□ 공사기간

ㅇ 변경전) 2023.9.12. ~ 2023.11.06.

ㅇ 변경후) 2023.9.12. ~ 2023.12.31. (45일 증)

□ 공사업체

구분	설 계	감 리	시 공	비 고
음성 안내	**********	**********	********
바닥 신호	**********	**********	*********

Ⅲ		검토내용

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	(신호)전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	시공사	(신호)전기공사업	적 정

Ⅳ		조치의견

□ 제반서류가 적정하여 조건부승인하고자 함

Ⅴ		행정사항

□ 원인자 및 유관기관 승인 통보

붙임  공사추가승인요청서(별첨) 2부.  끝.