문서번호	교통행정과-103011
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
이준상		심재호		이진영		11/24
						신용철
협조	재무과장		나재진
	예산팀장		박영수
	계약팀장		황미란
	주무관		설태연

2023년 노면표시 유지보수공사(연간단가) 설계변경(제1회) 시행보고

- 2023년 노면표시 유지보수공사(단가계약) -

설계변경(제1회) 시행보고

2023. 11.

(교통행정과)

- 2023년 노면표시 유지보수공사(단가계약) -

설계변경(제1회) 시행보고

우리 구에서『2023년 노면표시 유지보수공사(단가계약)』시행 중 공사물량 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 2023년 노면표시 유지보수공사(단가계약)

❍ 위    치 : 성동구 관내

❍ 공사기간 : 2023. 3. 6. ~ 2023. 12. 31.

❍ 공사규모

- 차선도색: 3,800m, 차선재도색: 8,600m, 차선제거: 780m, 표지병 설치: 45개소

❍ 공 사 비 : 63,110,980원 (도급비 46,966,900원, 관급비 16,144,080원)

❍ 계약상대자 : 우리피앤알(주) 대표 인창호

Ⅱ		예산 현황

구분	예산과목	예산
구비 (본예산)	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 교통안전시설물 설치 및 관리, 시설비(401-01)	70,000천원
합 계		70,000천원

❍ 현재 예산

❍ 추가 예산

구분	예산과목	예산
시비 (재배정)	보행자전거과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이용편의 증진, 어린이보호구역 개선, 시설비(401-01)	59,000천원
구비 (추경)	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 어린이(노인)보호구역 개선, 시설비(401-01)	24,000천원
구비 (특교)	교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통안전 및 시설개선사업, 교통약자보호구역 개선사업, 시설비(401-01)	20,600천원
합 계		103,600천원

Ⅲ		설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 주민 민원사항 등에 따른 공사물량 증 ‧ 감

- 보호구역 확대지정(금호초,옥수초), 어린이보호구역 시종점 노면표시 개선 어린이보호구역 개선(구비추경) 등 시행에 따라 노면표시의 신속한 정비를 위해 연간단가 공사 활용.

☞ 관련근거

보호구역 확대지정[교통행정과-40508호(2023.5.15.)]

어린이보호구역 개선사업[2023년 추경예산]

어린이보호구역 시종점 노면표시 개선[市 보행자전거과-15925호(2023.11.2.)]

❍ 주요 물량 증·감 내역

구 분	단위	수량		증·감	비고
		당초	변경
차선도색	m	3,800	11,810	증 8,010
차선재도색	m	8,600	13,810	증 5,210
차선제거	m	780	5,603	증 4,823
도로표지병	개	45	0	감 45

❍ 설계변경 금액

- 부족한 예산 110,489,020원은 낙찰차액 6,889,020원, 시비재배정예산 59,000천원, 구비(추경) 24,000천원, 구비(특교) 20,600천원을 추가하여 총 예산 173,600천 원으로 사업 추진

(단위: 원)

구 분	예산액	총공사비	도급비	관급비	낙찰차액
변경 전	70,000,000	63,110,980	46,966,900	16,144,080	6,889,020
변경 후	173,600,000	173,600,000	139,158,580	34,441,420	0
증 · 감액	103,600,000	110,789,020	92,491,680	18,297,340	- 6,889,020

Ⅳ		조치 계획

❍ 상기 내용과 같이 공사시행에 따른 변경사항에 대하여 설계변경을 시행하고 관내 노면표시 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증확인서 1부.

3. 관련공문 각 1부.  끝.