문서번호	도시철도건축부-9184
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축공사과장	도시철도건축부장
김영준		김광기	11/27
			임우진
협조
	주무관		강지영

「별내선(8호선연장)1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

2023.11.

도시기반시설본부

(도시철도건축부)

「별내선(8호선 연장) 1공구 건설공사」

건축공사 설계변경 실정보고 검토

별내선(8호선 연장) 1공구 *********************에 따른 실정보고 검토임.

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

- 제9장 계약 일반조건, 제6절 공사 설계 변경

ㅇ 정거장 기능실 개선 협조 요청[서울교통공사 철도사업처-2432(’23.6.2.)호]

ㅇ 별내선 1공구 실정보고 승인요청[별내 감1-23-879(’23.11.24.)호]

□ 실정보고 내용

*************************************************************************************************

********************************************************************

- ****************************************************************

************************************

□ 실정보고 내용 검토

ㅇ 관련법규 검토

-「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제9장 계약 일반조건,

제6절 공사 설계 변경

: 1. 가. 4) 그 밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

ㅇ 공사내역 검토

- 공사변경내역

품명	단위	수량		단가(원)	금액(원)		증감
		변경전	변경후		변경전	변경후
*****	*	**	**	******	*******	*******	*********
******	*	**	**	*******	*********	*********	**********
*****	*	*	*	*******	*	*******	**********
*****	*	*	*	******	*	******	*********
*** ******	*	*	*	******	*	*******	**********
****** *****	*	*	*	*******	*	*******	**********
******	**	*	*	******	*	*******	**********
******	**	*	*	*******	*	*******	**********
*** ******	*	*	*
******					*********	*********	************
***					*********	*********	**********
****					*********	**********	************

- 단가적용 검토

**********************

**************************************

*****************************************

************************************************

ㅇ 건설사업관리단 검토 의견

- 발주기관 및 운영사요청에 의한 설계변경으로 수량 및 금액을 검토하였으며 변경 금액은 차후 설계변경 시 반영함

□ 결과검토

ㅇ 관련 법규 및 내역검토 결과 건설사업관리단의 실정보고에 대한 승인이 타당하고 향후 설계변경 처리

□ 향후계획

ㅇ ’23.11. 실정보고 승인처리 (도시철도건축부 → 건설사업관리단)

ㅇ ’24.03. 공사 준공 시 내역반영 (6차공사)

붙 임 : 설계변경 실정보고 승인 요청 1부.  끝.