문서번호	기전설비과-10891
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
민성준		代문영민	11/27
			어용선
협조

「자양취수장 수열시스템 신설 전기공사」

설계변경(정산) 보고

2023. 11.

상수도사업본부

(생산부)

「자양취수장 수열시스템 신설 전기공사」 설계변경(정산) 보고
’23. 11. 27.(월)	생산부장 :어용선 3146-1319 기전설비과장 :윤양호☎1330 담당 : 민성준☎1337

「자양취수장 수열시스템 신설 전기공사」의 감리사에서 설계변경

(정산) 보고서가 접수되어, 변경 시행하고자 함

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 자양취수장 수열시스템 신설 전기공사

ㅇ 계약기간 : 2023. 6. 20. ~ 2023. 11. 30.

ㅇ 공사내용 : 수열시스템 설비 전기 인입, 배관·배선 등

ㅇ 계약금액 : 금57,611,690원

ㅇ 계약업체 : 태원전기안전관리 주식회사  대표 김선오

□ 설계변경 내용

ㅇ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행안부 예규 제252호, ’23. 7. 1.)

- 감리사 실정 보고(’23. 11. 16.)

ㅇ 변경사유 : **********************

*******************

*****************************************

***************************************

ㅇ 변경금액                                              (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증·감액
도 급 비	**********	**********	************

- 예산과목 : 기계장치, (정수센터 시설정비), 시설비및부대비, 시설비

ㅇ 원가계산 변경내용

비 목			계 약 금 액		증·감액
			당 초	변 경 후
순공사원가	재료비	직접재료비	*********	*********	*************
		[소 계]	*********	*********	*************
	노무비	직접노무비	**********	**********	***********
		간접노무비	*********	*********	***********
		[소 계]	**********	**********	*************
	경비	산재보험료	*********	*********	**********
		고용보험료	*******	*******	**********
		국민건강보험료	*******	*	***********
		국민연금보험료	*********	*	*************
		노인장기요양보험료	*******	* *	************
		산업안전보건관리비	*******	*******	**********
		기타경비	**********	**********	**********
		[ 소 계 ]	*********	*********	*************
순공사비 계			**********	**********	**********
일반관리비			*********	*********	*********
이 윤			*********	*********	***********
고용개선지원비			*********	*	*************
공급가액			**********	**********	*************
부가가치세			*********	*********	***********
도 급 액			**********	**********	*************

※ 증빙자료 미제출에 따른, 일부 경비 및 고용개선지원비 감액

□ 행정사항

ㅇ 설계변경 심의 소위원회 개최

ㅇ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

붙임  1. 설계변경 보고서(감리사) 1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서 1부.  끝.