문서번호	시설관리과-10581
결재일자	2023. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
박건수		양해선	11/24
			전태호
협 조

대형 제수밸브 점검정비 용역(강북지역)

기성금 지급 검토 보고

2023. 11.

상수도사업본부

(시 설 부)

대형 제수밸브 점검정비 용역(강북지역)

기성금 지급 검토 보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 양해선☎1530 담당 : 박건수☎1533

우리 본부에서 시행중인「대형 제수밸브 점검정비 용역」과 관련하여 기성금 지급 요청이 있어 이에 대해 검토하고 보고드림.

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검․정비 용역(강북지역)

ㅇ 용역대상

- 강남지역 400㎜이상 버터플라이밸브(1,794개, 설치 후 3년 이상 경과)

ㅇ 용역기간 : '23. 3. 27. ~ 12. 22.(271일)

연번	용 역 명	사업규모	계약금액 (천원)	용역사
계		************	*********
1	대형제수밸브 점검정비 용역(중부,서부지역)	**********	********	************
2	대형제수밸브 점검정비 용역(동부,북부지역)	**********	********	************

□ 주요 과업내용

ㅇ 대형제수밸브(D=400mm 이상) 및 밸브실 점검정비

- 버터플라이 밸브 기어박스 분해 및 윤활유 교체

- 누수 확인 및 노후 볼트 너트 교체

- 밸브 파손상태, 녹발생 등 외관조사

- 밸브 작동 여부 확인

<밸브실 환기>	<볼트점검 및 교체>	<기어박스 운활유 주입>	<밸브세척>

□ 추진 현황

ㅇ '23. 3. 27. : 용역 착수

ㅇ '23. 4.  3. : 용역 착수 전 자체 안전교육 실시(건양, 이준)

ㅇ '23. 4. 18. : 안전교육 및 장비점검 실시(대현산배수지)

ㅇ '23. 4. 21. : 착수보고회 개최

ㅇ '23. 10. 5. : 중간보고회 개최

('23. 11. 15. 기준, 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	비 고
대 상		1,794	489	421	601	283	****** *** ************
실 적	수행	1,786	489	417	597	283
	비율	99.5%	100%	99.0%	99.3%	100%

< 사업소별 미정비 현황 및 정비계획 >

ㅇ 사업소별 현황

<’23.11.15.기준>

구분		계	우선 조치 사항					단계적 조치 사항				공사장
			소계	점검불가 (매몰 등)	토사 적치	개폐 불가	형식 상이	소계	실협소	해체 불가	진입 불가
계		***	***	***	**	*	**	***	***	***	***	**
’23년 점검	소계	***	**	**	**	*	**	***	**	***	**	**
	중부	**	**	**	*	*	*	**	**	**	**	*
	서부	**	**	**	*	*	*	**	**	**	*	*
	동부	***	**	**	*	*	*	***	**	**	**	*
	북부	**	**	*	*	*	*	**	**	**	*	*
’22년점검	소계	***	***	**	**	*	*	***	**	**	**	*
	강서	**	*	*	*	*	*	**	**	**	**	*
	남부	***	**	**	*	*	*	**	**	**	**	*
	강남	**	**	**	*	*	*	**	**	**	**	*
	강동	**	**	**	**	*	*	**	*	**	**	*

*******************************************

*************************************************

************************************

□ 기성금 신청 내역

ㅇ 점검정비 완료 대상에 대해서만 기성 지급

(단위 : 천원)

용역명	계약금액	전회 기성금액	금회 기성금액	누계 기성금액	잔여금액	진행율(누계)
계	*********		*******	*******	*******	*****
대형제수밸브 (중부,서부지역)	*******	*	*******	*******	******	*****
대형제수밸브 (동부,북부지역)	*******	*	*******	*******	*******	*****

□ 기성 내역 검토

ㅇ 세부내역(중부, 서부)

구 분	관경	계약금액			금회기성(1차)금액		잔여금액
		수량	합 계		수량	금 액	수량	금액
			단 가	금 액
1.밸브 및 밸브실 점검정비	400~700mm(주간)	*****	*******	**********	*****	**********	*****	**********
	400~700mm(야간)	*****	*******	**********	*****	**********	****	*********
	800~1650mm(주간)	*****	*******	**********	*****	**********	****	**********
	800~1650mm(야간)	****	*******	**********	****	**********	***	*********
	1800mm이상(주간)	****	*******	*********	****	*********	***	*******
	1800mm이상(야간)	****	*******	*********	***	*******	***	*********
1.1 소계			*	***********	*	***********	*	**********
1.2 제경비	110%		*	***********	*	***********	*	**********
1.3 기술료			*	**********	*	**********	*	**********
2. 직접경비		**	*	***********	*	***********	*	*********
합 계			*	***********	*	***********	*	**********
산업안전보건관리비			*	*********	*	*********	*	*
공급가액			*	***********	*	***********	*	**********
부가가치세			*	**********	*	**********	*	*********
총 계			*	***********	*	***********	*	**********

※ 파란색 : 마이너스

ㅇ 세부내역(동부, 북부)

구 분	관경	계약금액			금회기성(1차)금액		잔여금액
		수량	합 계		수량	금 액	수량	금액
			단 가	금 액
1.밸브 및 밸브실 점검정비	400~700mm(주간)	*****	*******	*************	*****	***********	****	***********
	400~700mm(야간)	*****	*******	*************	*****	************	****	**********
	800~1650mm(주간)	*****	*******	*************	*****	***********	****	***********
	800~1650mm(야간)	****	*******	*************	****	***********	****	***********
	1800mm이상(주간)	****	*******	*************	****	************	****	**********
	1800mm이상(야간)	****	*******	*************	***	**********	***	************
1.1 소계			*	************	*	************	*	***********
1.2 제경비	110%		*	************	*	************	*	*************
1.3 기술료			*	*************	*	***********	*	*************
2. 직접경비		**	*	*************	*	***********	*	***********
합 계			*	*************	*	************	*	************
산업안전보건관리비			*	**********	*	**********	*	********
공급가액			*	************	*	************	*	************
부가가치세			*	***********	*	***********	*	***********
총 계			*	************	*	************	*	*************

□ 검토의견

ㅇ「대형 제수밸브 점검정비 용역」계약 용역 업체의 기성청구 내용이 적정하므로 기성금(1차) 금회 청구액을 지급하고자 함.

붙 임 : 1. 기성요청 관련 문서 각 1부.

2. 기성내역서(1회) 각 1부.  끝.