문서번호	급수운영과-21543
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이기명		신정우	11/27
			채재일
협 조

단수계획 보고(아현동@@@일대)

2023. 11.

급수운영과

단수계획 보고 (아현동******)

아현동****일대 노후 밸브 교체공사 관련한 단수계획 보고임.

※ 관련근거: 급수운영과-19250호(2023. 10. 26.), 작업지시(노후밸브 81)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2023년 마포구 관내 상수도시설물 정비공사

○ 공사위치: 마포구 아현동********

○ 공사내용: 노후 밸브 교체 1개소(제수 150mm)

○ 공사일시: 2023. 11. 28.(화) 09:00 ∼11:00(2시간)

□ 수계현황

○ 급수수계: ***********

○ 시설용량: *****

○ 표    고: *****

○ 급수계통도

******************************************************

□ 단수계획

○ 단수지역: 마포구 아현동******

○ 단수세대: ***

○ 관로제원: ******************

○ 수    압: *************************

○ 단수일시: 2023. 11. 28.(화) 09:00 ∼ 11:00 중 약 2시간

○ 작업(단수)시간 산출: 2시간

-  밸브철거 등(60분) + 배관(20) + 밸브접합(20분) + 세척 및  통수(20분)

○ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

-  관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 방지를 위하여 소화전밸브를 이용, 밸브 조절전 충분한 세척 시행

-  밸브 개폐 시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

-  공사를 완료하고 충분한 관 세척(소화전) 후 수질검사 실시

-  통수 후 주변 수질상태 모니터링

○ 밸브 조절 위치도: 붙임

- 밸브 조절: 단수 계획서 참조

○ 기타사항

- 단수 안내문 배포 및 상수도 홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전·후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임  단수안내문 및 계획서 1부.  끝.