문서번호	행정지원과-19002
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
장주환	김덕기	최광운	11/27
			유재명
협 조

「청사 승강기 설치 공사(건축,기계)」

설계금액 변경 보고

2023. 11.

강동수도사업소

행정지원과

「청사 승강기 설치 공사(건축,기계)」

설계금액 변경 보고

우리 사업소에서 진행중인「강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계)」의 물량 증감 및 보험료 정산에 따라 설계금액을 변경하고자 함

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명 : 강동수도사업소 청사 승강기 설치 공사(건축,기계)

ㅇ 공사개요 : 장애인용 승강기 1대(15인승,MRL식) 설치 및 부대공사 1식

ㅇ 기    간 : 2023. 7. 20.~2023. 11. 30.

ㅇ 계약금액 : 264,830,400원

ㅇ 계약업체 : ㈜다한다종합건설

□ 설계변경사유

ㅇ 마이크로파일 설치 공사물량 증가 및 내부구조 변경 등 신규공종 추가로 인한 증감 요인 발생

ㅇ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제8절(보험료 사후정산 등) 규정에 의거 각종 보험료(건강, 연금, 노인장기요양, 퇴직공제부금비), 고용개선지원비 등 사후정산 자료 제출에 따른 증감 요인 발생

□ 세부 변경사항

ㅇ 물량변경내역

구 분	공사내역	단위	증감 물량		증·감
			당 초	변 경
****	*******************	**	*	*	****
	******************	**	*	*	****
	********************	*	*	*	****
구 분	공사내역	단위	증감 물량		증·감
			당 초	변 경
********	***********	*	**	**	*****
	**********	*	**	**	*****
	*******	*	**	**	*****
**********	******	*	*	***	******
	******	*	***	***	*****
	******************	*	*	****	*******
	*******	*	**	****	*******
***	******************************	*	**	**	*****
	**************************	*	***	******	*********
****	*********	*	**	****	*******

ㅇ 신규공종내역

연번	공사내용	공사사유	공사금액	비고
*	***********************	******************************	**********
*	******************	**********************************	**********

ㅇ 각종 보험료 등 정산

구분	당초	변경	증·감
*****	*********	*	************
*****	*********	*	************
*********	*******	*	**********
*******	*********	*********	**********
*********	*********	*********	**********
*****	*******	*	**********
**********	*******	*	**********
***********	*******	******	**********

구분		당 초	변 경	증 · 감
***	****	***********	***********	*************
	*****	**********	**********	************
	*	***********	***********	*************

ㅇ 계약금액 변경내역

□ 행정사항

ㅇ 상기 변경사항에 대하여 사업소 자체 설계변경 심의위원회 개최

ㅇ 심의위원회 결과에 따라 설계변경 시행.  끝.