문서번호	총무과-32482
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
이동욱		소영수	11/28
			조영창
협조

2023년 청사 녹지대 유지보수공사 설계변경 검토보고

2023년 청사 녹지대 유지보수공사

설 계 변 경   검 토 보 고

2023.  11. 27. (월)

행 정 국

(총무과)

2023년 청사 녹지대 유지보수공사

설 계 변 경   검 토 보 고

'23년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가) 시행 중 물량 증·감, 신규 공종 추가 등에 대한 설계변경을 시행하고자 함.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2023년 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가)

********************************

***********************************

*******************

ㅇ 계약내용 : 녹지대 식재 및 유지보수(17개 공종)

□ 설계변경 사유 및 내용

ㅇ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 (제9장 계약 일반조건 제6절 공사 설계 변경 등, 제7절 계약금액의 조정)

**********

****************************************

***********************

****************

******	************
*****	*******

*************

******	**********************
*****	*******

******

******	*******	***	******
****	*********	**
****	*********	**
****	************	***

※ 세부내역은 붙임 1. 변경내역서 참고

□ 설계변경 적용단가 합의내용

ㅇ 설계변경으로 인한 계약내용 조정

- 물량 증·감 : 계약단가 적용

- 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율를 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

□ 향후일정

ㅇ 2023. 11월 : 변경계약 의뢰

ㅇ 2023. 12월 : 준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 합의각서 1부

3. 공사 결과보고서 1부.  끝.