문서번호	문화재관리과-16287
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		세계유산등재팀장	문화재관리과장
소규섭		신영문	11/28
			김건태
협 조

변경사항 보고(한양도성 유적전시관 안내판 보수)

2024. 11.

문 화 본 부

(문화재관리과)

한양도성 유적전시관

안내판 보수 계획 변경사항 보고

기존	변경 후
**********************	***************************

진행중인 「한양도성 유적전시관 안내판 보수」(관련문서 : 문화재관리과-15540호) 사업에 추가 진행사항이 발생함에 따라 관련 내용을 보고함

□  사업 개요

○ 소요금액

○ 대   상 : 한양도성 유적전시관 외부 유적 앞

○ 위   치 : 중구 소파로 46 외 13필지(남산 회현자락)

○ 기존내용

- 유적전시관 해설 및 전시관 개관시간 안내 등 문구 수정

- 탈색·벗겨짐 등 노후된 자료 사진(성돌, 조선신궁 배전터, 방공호) 교체

- 반려견 출입금지, 식음료 반입금지 등 기타 관람시 주의 문구 안내판 신규제작

- 현재 진행사항 : 안내판 및 거치대 시안 제작 <붙임 2, 3참조>

○ 추가내용

- 해설 안내판 1기 추가 보수

- 주의 문구 안내판 1기 추가제작

- 외부유적 해설용 리플렛 거치대 4기 신규제작

□  추가사업 발생 사유

거치대 도장 박락 및 산화(녹) 상태 사진

○ 외부 유적에 기 설치된 안내판 중 1기(방공호)의 추가 보수가 필요한 것으로 판단됨

○ 리플렛 거치대의 노후화로 인하여 교체 필요

□  행정사항

○ 추가 소요금액 대상 e호조 품의

○ 변경계약 의뢰(방침서 및 합의각서, 변경산출내역서 첨부)

붙임 1. 견적서 1부.

2. 안내판 시안 1부.

3. 리플렛거치대 시안 1부.  끝.