아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청[노면표지용 페인트 구매-2023년 도로굴착복구 노면표시 도색공사]

우리 과에서 시행중인 「2023년 도로굴착복구 노면표시 도색공사)」에 소요되는 관급자재에 대해 아래와 같이 납품기한 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 변경내역

연번	품명	규격	단위	수량			납품기한		납품요구 번호	비고
				당초	변경	증·감	당초	변경
1	마킹페인트	DRP-4W-P4-R5-RW4, 20kg/포, 흰색, 융착식	포	820	820	변동없음	***** *****	***** *****	******* *********
2	마킹페인트	DRP-4Y-P4-R5-RW4, 20kg/포, 노란색, 융착식	톤	140	140	변동없음	***** *****	***** *****
계			톤	***	***		***** *****	***** *****

2. 변경사유: 현장여건을 반영하고 절대공기 부족에 따른 납품기한 변경

3. 예산과목: 도로보수과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임:  분할납품요구서 1부.  끝.

	도 로 보 수 과 장
주무관	박해웅		도로보수과장	11/28
신준식
협조자
시행	도로보수과-12205	(	2023. 11. 28.	)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33, (대치동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0340	/전송	02-2040-0307	/	glassky@seoul.go.kr	/	부분공개(5)