문서번호	급수운영과-19089
결재일자	2023. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
천남희	류태현	이용구		11/27
				김분숙
협 조	행정지원과장		홍기관
	주무관		공보라

용역 준공기한 연기 보고

(2024년 범안로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역)

2023. 11. 27. (월)

남부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

용역 준공기한 연기 보고

(2024년 범안로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역)

우리사업소에서 시행 중인 「2024년 범안로 장기사용 송배수관 정비공사   교통소통대책 수립 용역」의 준공기한을 교통처리자문심의위원회 심의일정을 감안하여 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2024년 범안로 장기사용 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립 용역

○ 용역기간 : 2023. 9. 21. ~ 2023. 11. 29.

○ 계약금액 : **************************

○ 계 약 자 : ***********

○ 과업내용 : 교통현황 조사, 교통영향 분석, 교통처리 심의절차 이행 등

- 서울시 금천구 범안로 670m (D=600mm, L=670m)

□ 보고내용

○ 교통소통대책 자문회의 심의 요청 : 2023. 11. 24.(금)

○ 교통소통대책 자문회의 예정일 : 2023. 12. 14.(목)

○ 준공기한 연기 사유

************************************************************************************************************

******************************************************

□ 조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이 교통소통대책 심의 및 자문회의 결과 보완 등 행정절차 이행을 위해 준공기간을 아래와 같이 연기(30일)하여 용역 수행에 만전을 기하고자 합니다.

- 준공기한 변경 : (당초) 2023. 11. 29. → (변경) 2023. 12. 29.

- 지체상금 부과여부: 미부과

□ 행정사항

○ 준공기한 연기 계약 의뢰(행정지원과)

붙임  준공기한 연기요청서 1부.  끝.