아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(한강공원 승강기 구매·설치)

한강공원 「올림픽대교북단 외 1개소 및 마포종점나들목 승강기 구매·설치」에 사용되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 관급자재 납품기한 연기요청 사항

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2. 연기사유 : 선행공정 지연으로 승강기 설치일이 도래하지 않아 납품기한 연장 필요

붙임   1. 납품기한 변경보고서 1부.

2. 분할납품요구서(당초계약) 1부.  끝.

	기 전 설 비 과 장
주무관	김준혁		기전설비과장	11/28
김진보
협조자	주무관	백지원
시행	기전설비과-4353	(	2023. 11. 28.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 성수동 1가 642-25 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	junhyuck98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)