문서번호	소방행정과-11258
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
소방교	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
백인창	한일수	김연경		11/28
				박용호
협 조
	재난관리과장		최연웅
	예방과장		代전철
	현장대응단장		우경식
	센터장		김장환

장위119안전센터 임시청사 이사 계획

2023. 11.

성 북 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

장위119안전센터 임시청사 이사 계획

소방행정과장 :김연경☎6981-7210 장비팀장 : 한일수☎7220 담당 : 백인창☎7224

성북구 장위6구역 주택재개발 정비 사업 관련 장위119안전센터 임시청사 준공에 따른 이사 계획임.

□ 임시청사 개요

ㅇ 공사기간: ’23. 5. ~ ’23. 11. (7개월)

ㅇ 위    치: 성북구 장위동 121-1      * 기존 장위119안전센터 북쪽 200M 지점

ㅇ 규    모: 경량철골조 지상1층 연면적 575.04㎡ 부지면적 1,729㎡

ㅇ 시행/시공: ****************

ㅇ 건 축 비: *****************

ㅇ 공간구성: 사무실, 차고, 장비보관실, 체력단련실, 식당, 센터장실,

대기실(진압, 구급, 여직원), 휴게실 등

□ 그간 추진경과

ㅇ 장위6구역주택재개발 사업시행 인가: ’15. 5.

ㅇ 가설건축물(임시청사) 설계: ’22. 8. ~ 10.

ㅇ 가설건축물(임시청사) 건축 허가: ’22. 11.

ㅇ 착공 및 준공: ’23. 5. ~ 11.

□ 이사일정

ㅇ 임시청사 및 주변 부대공사 준공: ’23. 11. 30.

ㅇ 기존청사 무상양여 및 신축청사 무상귀속 협약체결: ’23. 11. 30.

ㅇ 사전점검: ’23. 11. 30.

ㅇ 출동지령망 이전설치: ’23. 12. 6.

ㅇ 임시청사 이사 및 업무개시: ’23. 12. 5. ~ 6.

□ 세부 이사계획

ㅇ 일    시: ’23. 12. 6.(수) 09:00 ~

ㅇ 이사물품: 소방장비 261점, 집기비품 149점, 직원사물 등

ㅇ 이사방법: 전문업체 위탁(포장이사, 통신업체)

ㅇ 비용부담: 정비사업조합

ㅇ 책임관 지정(안전관리 포함)

- 총    괄: 소방행정과장(장비회계팀장)

- 실무책임: 장위119안전센터장(진압대장 3)

ㅇ 분야별 임무분담

구 분	담 당 업 무	책 임 자
소방차량	펌프차·탱크차·구급차·이륜차	장비담당
통신장비	지령망 / 유·무선 등 통신장비 일체	재건축담당
사무실	사무실 집기비품 및 전산장비, 서류 등	장위센터장
대기실	침구류·침대·옷장·개인사물	장위센터장
식당비품	식탁·의자·주방기구 등	장위센터장 (식당담당)
소방장비	진압 / 구조 / 구급 / 호흡보호장비 등 장비 일체	장위센터장
기타	전기·수도 등 영선 일체	재건축담당

※ 이전 3일전 서류박스, 에어캡, 테이프 등 필요 재료 제공

□ 부서별 협조사항

ㅇ 소방행정과

- 임시청사 이사 관련 업무 총괄(장비회계팀)

- 임시청사 이사 간 안전사고 방지 철저(장비회계팀)

- 본부 및 소방관서 장위119안전센터 임시청사 이전 계획 안내(행정팀)

- 임시청사 이사 관련 비번동원자 초과근무 인정(행정팀)

- 임시청사 이사 관련 대시민 안내(홍보교육팀)

ㅇ 재난관리과

- 임시청사 이사 기간 중 출동력 공백 방지 방안 강구

ㅇ 장위119안전센터

- 임시청사 이사 관련 기존 집기비품 및 장비 사전 정리

- 임시청사 이사 기간 중 직원 안전사고 방지 철저

- 임시청사 이사 완료 보고(’23. 12. 8. 한)

붙임 장위119안전센터 임시청사 현황 자료 1부.  끝.

붙임 1		장위119안전센터 임시청사 현황 자료

□ 현청사 및 임시청사 현황

구 분	현청사(용도폐지)	임시청사
위치	성북구 장위동 34	성북구 장위동 121-1
대지면적	419㎡	1,729.16㎡
연 면 적	330.93㎡	575.04㎡
층 수	지상 2층	지상 1층

□ 임시청사 내부 구분 및 면적

구분	사무실	센터장실	차고	장비보관실	세탁·샤워실	체력단련실	식당
면적	53㎡	12㎡	112㎡	20㎡	13㎡	34㎡	25㎡
구분	창고	보일러실	휴게마당	진압대장실	진압대기실	여직원대기실	구급대기실
면적	12㎡	4㎡	57㎡	11㎡	47㎡	17㎡	27㎡

장위119안전센터 이전 배치도	장위119안전센터 내부 평면도

장위119안전센터 임시청사 차고 전경	장위119안전센터 임시청사 주출입구

□ 임시청사 위치도

장위119안전센터 임시청사 위치도