【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서

(2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사)

부분공개(7)

시 행	급수운영과-19514
시행일자	2023. 11. 28.
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장 (안전조사과장)
접수번호
접수일자

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
최박		김종섭	11/28
			이규희
협 조

공 사 명	2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사		요청기관	강동수도사업소
공사위치	송파구 잠실동 3사거리~잠실동19-8
공사기간	2023. 5. 8.~2024. 1. 1.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
계약금액 (최초계약 금액)	*************** *****************
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	장기사용송배수관정비	시설비
공사개요	D=100~900mm, L=972m
설 계 자	․상 호: (주)유 신 ․대 표 자: 김성만 ․책임기술자: 김성만 (전화번호: 02-6202-0654)
발 주 자	․담 당 자: 최 박 (전화번호: 02-3146-5153)
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 송파구 잠실동 3사거리~잠실동 19-8 2호선 지하철 구조물, 하수박스 등 지장물 과다로 인하여 토공, 무설공 등 수량 증가로 도급비 증액 - 당초: *************** 변경: ****************************** - 물량 증감 및 제경비(보험료 등), 고용지원개선비 정산
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(설계변경내역서, 단가산출서, 수량산출서)

끝.