등록번호	치수과-24877		주무관		하수팀장		치수과장		안전건설교통국장
			최인영		이성하		김규엽		11/28
결재일자	2023. 11. 28.
									정욱성
공개구분	부분공개(5)
			협조
- 남대문로5가450주변 외3개소 원형관로 보강공사 - 설계변경(정산) 시행 검토보고
안전건설교통국 치 수 과

- 남대문로5가 450주변외3개소 원형관로 보강공사 -

설계변경(정산) 시행 검토보고

우리 구에서 시행중인「남대문로5가 450주변 외 3개소 원형관로 보강공사」와 관련, 시공물량 변경(증·감) 등 설계변경 요인이 발생하여 아래와 같이 검토 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 남대문로5가 450주변 외3개소 원형관로 보강공사

▢ 공사기간 : '23. 5. 8. ~ '23. 12. 13.

▢ 공사규모 : ******************************

▢ 총공사비 : ******************

▢ 도급업체 : ****************

▢ 감 리 단 : **********************

▢ 예산과목

(단위 : 천원)

구 분	세부사업명	예 산 과 목	예 산 액	비 고
시 비	남대문로5가 450주변 외3개소 원형관로 보강	**************************************************************************************	*********

Ⅱ		보 고 내 용

▢ 현장 실정보고 반영【치수과 - 21268호(2023.9.12.)】

○ 공종변경(주간 → 야간), 일부 공사구간 조정

▢ 현장 실정보고 반영【치수과 - 22855호(2023.10.17.)】

○ 노후 관로 추가정비 등

▢ 공종별 시공물량 증·감에 따른 설계변경

▢ 제경비 정산에 따른 감액

▢ 기타 경미한 변경

Ⅲ		주요 변경내용

▢ 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액				비고
		당 초	변 경	증 · 감
총 공 사 비		*************	*************	**	**********
도 급 비	공 급 가 액	*************	*************	**	**********
	부가가치세	***********	***********	**	*********
	합 계	*************	*************	**	**********

▢ 주요 공정 변경내역

공 종	규 격	단위	수 량		증·감		비 고
			당 초	변 경
원형관로 보강(1구간)	Φ900mm	M	***	*****	**	****
원형관로 보강(2구간)	Φ1000mm	M	***	*	**	***
원형관로 보강(2구간)	Φ1000mm(야간)	M	*	***	**	***
원형관로 보강(3구간)	Φ1000mm	M	***	*	**	***
원형관로 보강(3구간)	Φ1000mm(야간)	M	*	***	**	***
원형관로 보강(4구간)	Φ1200mm	M	**	**	**	**

Ⅳ		조 치 계 획

▢ 상기 보고내용과 같이 시공물량 변경(증·감)사항 등을 반영하여 설계변경(정산)을 시행하고 변경계약 체결 후 준공 처리하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 사유서 1부.

붙 임 : 2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

붙 임 : 3. 제비율 검증확인서 1부.

붙 임 : 4. 실정보고에 따른 검토보고서 각1부.  끝.