문서번호	급수운영과-19499
결재일자	2023. 11. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
최박	김종섭	11/28
		이규희
협 조

설계변경 및 계약금액 조정(2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사)

2023. 11.

강동수도사업소

(급수운영과)

설계변경 및 계약금액 조정

2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사(리센츠아파트앞)의 계약금액 증액사항이 발생하여 계약금액 조정이 필요한 바 본부에 설계변경 심의를 요청 후 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하고자 함

※ 관련근거 : 『'2023년 상수도사업 계약심사 추진 계획』 [안전조사과-895(2023.1.27.)]

□ 공사현황

□ 공 사 명: 2023년 올림픽로 장기사용 배수관 정비공사(리센츠아파트앞)

□ 공사개요: 구경 100~900㎜, 연장 972m

□ 계약기간: 2023. 5. 8. ~ 2024. 1. 1.

□ 도 급 액: 금1,703,546,500원

□ 계 약 자: (주)효림이엔지  대표 임거로

□ 감 독 자: 서울시설공단 조남명

□  설계변경 사유

□ 시공물량 증감

규 격	당 초	변 경	증 감	비 고
상수도관 부설 (100~900mm)	972m	937m	감 35
밸브실 설치	10개소	25개소	증 15

□ 잠실3사거리~잠실동 19-8 2호선 지하철 구조물, 하수박스 등 지장물이 과다하여 토공 및 부설공 등 증가

□ 제경비(4대보험료 등), 고용지원 개선비 등 실정산

□  계약금액 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
도 급 액	1,703,546,500	1,998,832,000	증) 295,285,500	증 17.3%

□ 조치 계획

□ 송배수관정비공사의 10% 이상 도급비 증액 사항으로 본부(안전조사과)에 설계변경 및 계약금액 조정 심의를 의뢰하여 심의결과에 따라 설계 변경 시행코자 함.

붙임  설계변경내역서 등 관련서류 1부.  끝.