문서번호	기전과-12894
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
박준규	11/29
	김병용

(여의도동31번지 복합시설 설치공사)

교통안전시설물(신호)원인자공사

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  11.

강서도로사업소

(기전과)

여의도동 31번지 복합시설 설치공사

교통안전시설물 원인자공사 승인 검토보고

사업소장 : 이경우☎2657-7910 기전과장 : 김병용☎7908 담당 : 박준규☎7963

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사의 승인요청을 검토하고 결과를 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 여의도동31번지 복합시설 신축공사 중 교통안전시설물 원인자부담금 공사기간 현장 및 설계변경 실정보고 제출

ㅇ 여의도엠비씨 제23-135호(2023.09.18.)

□ 여의도동복합시설 신축공사 감리용역비 추가 부과 요청

ㅇ 기전과-9667호(2023.09.20.)

□ 추가감리비 이체확인(2023.11.13.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 여의도동 31번지 복합시설 설치공사

□ 원 인 자 : (주)여의도엠비씨부지 복합개발 피에프브이

□ 공사위치 : 여의도동 31번지 일대

□ 공사내용 : 부지일대 교통신호기 설치

□ 공사업체

구분	설 계	감 리	시 공	비 고
신호	**********	******** *******	********

Ⅲ		실정보고 사항

□ 도급비 : 67,700천원 → 338,800천원(증271,100천원)

ㅇ MBC앞 : 추가규제에 의한 교차로 물량 변경

ㅇ 여의도수정아파트(연등) : 추가규제에 의한 교차로 연등분리

ㅇ 경보등 신설 2개소 및 제경비 반영

□ 공사기간 연장

ㅇ 당초) 2022.11.18. ~ 2023.09.30.

ㅇ 변경) 2022.11.18. ~ 2025.09.30.  (증 731일)

□ 상세내용 및 내역 붙임 실정보고 참조

Ⅳ		검토내용

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	(신호)전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	시공사	(신호)전기공사업	적 정

Ⅴ		조치의견

□ 제반서류가 적정하여 조건부승인하고자 함

Ⅵ		행정사항

□ 원인자 및 유관기관 승인 통보

붙임  공사 실정보고 제출보고서 1부.  끝.