아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(자양취수장 수열시스템 신설 전기공사)

1. 기전설비과-10891(2023. 11. 27.)호와 관련입니다.

2. 「자양취수장 수열시스템 신설 전기공사」의 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행하고

변경계약을 의뢰하오니 조치해 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 자양취수장 수열시스템 신설 전기공사

나. 계약기간 : 2023. 6. 20. ~ 2023. 11. 30.

다. 계약업체 : 태원전기안전관리 주식회사 대표 김선오

라. 설계변경 내용

- 변경사유 : 설계 누락 및 현장여건에 따른 시공 변경

- 변경금액                                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증·감액	비 고
도 급 비	**********	**********	************	추산금액 - 당 초 : 65,912,000 - 변 경 후 : 61,273,310 - 증·감액 : 감) 4,638,690

- 예산과목 : 기계장치, (정수센터 시설 정비), 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 관련 방침서 1부.

2. 설계변경 심의 소위원회 개최결과 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	생 산 부 장
주무관	민성준		기전설비과장	윤양호		생산부장	11/28
어용선
협조자	주무관	김은지		예산팀장	천은령
시행	기전설비과-10897	(	2023. 11. 28.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1337	/전송	02-0231-4613	/	iloveramen@seoul.go.kr	/	부분공개(5)