문서번호	시설건설과-11524
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설건설과장	시설부장
박윤선	이승우	11/29
		전태호
협 조

올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사

현장실정보고에 따른 검토결과 보고

2023.  11. 28.

상수도사업본부

(시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사

현장실정보고에 따른 검토결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설건설과장: 이승우☎1490 담당: 박윤선☎1494

「올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사」 시행 중 서울시설공단에서 제출한 현장실정보고서(4차, 5차) 대한 검토결과를 보고드림.

□ 관련문서

ㅇ 현장실정 검토보고서 제출(4차)[서울시설공단 공사감독2처-11886(2023. 10. 4.)호]

ㅇ 현장실정 검토보고서 제출(5차)[서울시설공단 공사감독2처-13861(2023. 11. 1.)호]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 올림픽로35길 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023. 5. 22.~ 2024. 12. 20.

ㅇ 공사개요: D= 300~ 1,000㎜ L=1,888m 등

ㅇ 도 급 비: 6,378,290,00원

ㅇ 시 공 사: **************

ㅇ 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처 조남명

□ 현장실정보고 내용

① 중간집하장 변경:******************

*************************************

*****************************************

공 종	당 초	변 경	거 리
거 리	**	****	*******
개략공사비	**********	**********	************

② 사토장 변경: ***********

- **************************************************************************************************************************************************************************************************

‣ ****************************************************************

공 종	당 초	변 경	거 리
거 리	***	*****	********

③ 아스팔트 두께 증가: *************

- ******************************************************************************

위치도	현장사진

**************************************************************

	수 량	금 액	비 고
계		********
잔토처리	******	********
폐아스콘	******	*	******

□ 검토결과

① 중간집하장 변경관련

***********************************************************************

********************************************************

*****************************************************************************

***************************

② 사토장 변경관련

********************************************************************************************************

*****************************************************************

***********************************

*****************************************************

③ 아스팔트 두께 관련

************************************************************************************************

*************************************************************

************************************************************************************************

*****************************************

**********************************************************************************

□ 조치계획

ㅇ 실정보고 검토결과 건설사업관리기술인(서울시설공단)에 통보

- 승인결과를 반영하여 우선 시공(변경)토록하고, 추후 설계변경 및 정산

ㅇ 건설폐기물 처리용역 설계변경 시행

- 아스팔트 두께 증가에 따라 추가 발생한 건설폐기물 처리토록하고, 추후 설계변경 및 정산

붙임  현장실정 검토보고서 제출 각 1부.  끝.