문서번호	건축부-19613
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
박진희		박용구	11/29
			代정채문
협조
	주무관		이수진

창작연극지원센터건립공사 총차 및 3차수 계약변경 검토보고

『창작연극지원센터건립공사』

총차 및 3차수 계약변경 검토보고

2023. 11. 28. (화)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『창작연극지원센터건립공사』

총차 및 3차수 계약변경 검토보고

‘창작연극지원센터 건립공사’ 관련 건설사업관리자로부터 제출된 간접비 및 설계변경 소위원회(2023-13차) 자문결과를 반영한 계약금액 조정 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

□ 공사개요

ㅇ 대지위치 : 성북구 동소문동1가 1-4번지 외 1필지

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상6층, 연면적 7,273.3㎡

(소극장 215석, 블랙박스형극장 150석)

ㅇ 주 용 도 : 문화 및 집회시설 (공연장)

ㅇ 공사기간 : (총차) '20.2.1. ~ '24.02.29. (3차 '22.3.1.~'24.2.29.)

ㅇ***************************************************

ㅇ 시 공 사 : 세정토건주식회사, 중경건설주식회사, 주식회사송학건설

ㅇ 감 리 자 : (주)목양종합건축사사무소, (주)동해종합기술공사

□ 추진경위

***********************

***********************

***************************************

***********************************************

***************************************

*********************************************

***************************

***********************************************

***************************************

**********************************************

***************************

***********************************************

***************************************

******************************************************

***************************************

***************************************

***************************************

***************************************

*****************************************

***************************************

****************************************

***************************************

******************************************************

□ 계약변경 검토

ㅇ 관련근거

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조, 같은법 시행령 제73조 및 시행규칙 제72조

-「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제13장(공사계약 일반조건)

- *************************************************

- **************************************************

- **************************************************

- **********************************************************

ㅇ **************************

- ******************************

- ******************************

- *****************************

ㅇ 계약금액 조정내역

- 총공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	▲증(▼감)
총차	****	**************	**************	*************
	****	************* ***********	************* ***********	**** ****************************
3차	****	*************	*************	*************
	****	************* ***********	************* ***********	**** ****************************

- 공종별 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	▲증(▼감)
총차	****	*************	*************	*************
	****	*************	*************	*************
	****	***********	***********	****
	****	*************	*************	*************
	**** *********	*	*********	*************
	***	*	***********	*************
	**** **	***********	***********	****
	*****	**************	**************	*************

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	▲증(▼감)
3차	****	*************	*************	*************
	****	***********	***********	*************
	****	***********	***********	****
	****	***********	***********	*************
	**** *********	*	*********	*************
	***	*	***********	*************
	**** **	***********	***********	****
	*****	*************	*************	**************

□ 건설사업관리단 종합의견

ㅇ ***********************************************************************

□ 처리의견

ㅇ *************************************

붙임  1. (건설사업관리단)설계변경 자문회의 반영으로 인한 계약금액 조정 요청 1부.

2. 변경계약 내역서 (총차,3차) 각 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.