문서번호	토목부-22256
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
노승환		박운용	11/29
			이임섭
협조

- 양재대로 구조개선공사 - 물가변동으로 인한 계약금액 조정(제20회) 검토 보고

- 양재대로 구조개선공사 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제20회)검토 보고

2023. 11.

도시기반시설본부

(토      목      부)

- 양재대로 구조개선공사 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제20회) 검토 보고

「양재대로 구조개선사업」과 관련 물가변동에 따른 계약금액 조정(제20회, 4.6%) 요청이 접수되어 검토 후 보고드림

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 양재대로 구조개선사업

ㅇ 공사규모 : 대모지하차도 연장 1,174km 폭4차로

ㅇ 공사기간 : **************

ㅇ 도 급 비 : ********

ㅇ 시공사/건설사업관리단 : ***********************

□ 검토내용

ㅇ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 대상여부

- 직전조정일(기준시점) 이후 90일 이상 경과

- 직전조정일 기준으로 산출 지수조정률이 3%이상 증·감된 경우

ㅇ 계약금액 조정방법 : 공사계약서에 의거 지수조정률 적용

ㅇ 대상여부 검토결과 : 물가변동 대상

구 분	검 토 항 목		검 토 내 용	결 과	비고
조정 방법	계약서 명기사항 확인		********	***
적용 요건	①물가변동 경과기간	기준시점으로부터 90일 이상 경과	******* ******************** ********************	***
	②물가변동 조정율	3/100 이상 증감	*******************	***
	③조정기준일 (비교시점)	①,② 동시 충족 되는 최초의 날	******************* *******	***
	****************************

ㅇ 물가변동 지수조정률  : *****

구 분	비목군 분류대가(원)	가중치 (A)	지수율 (K)	가중지수율 (A×K)	비 고 (기준일)
기존공종(K0)	**************	******	*****	*********	***********
신규공종(K1)	***********	******	******	**********	***********
신규공종(K2)	**********	******	*****	*********	***********
계	**************	******	*	*****

ㅇ 물가변동 계약금액 조정금액 : **************

구 분		조 정 금 액	비 고
① 물가변동 대상공사의 계약금액		*****************	**************** *********
② 물가변동 적용 제외 금액		*****************	*******************
			*******
물가변동 조정기준일 현재 공정률	예정공정율	*******
	실행공정율	*******
	기성수금율	*******
③ 물가변동 적용 대가		****************	*****
④ 지수조정율(K)		******
⑤ 물가변동 등락 대상 조정 금액		*****************	*****
⑥ 선금급 공제금액
⑦ 기타 공제금액
⑧ 물가변동 조정 적용금액		*****************	*********

□ 조치계획

ㅇ 상기 내용을 검토한 결과 대상금액, 조정률 산출 등은 적정한 것으로 판단되며, 설계변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 건설사업관리단 물가변동 검토서 1부.

2. 물가변동 내역서 1부.  끝.