문서번호	시설관리과-18998
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
전고운	代전고운	11/30
		성기옥

「장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)」

설계변경 보고(1차)

2023. 11.

강동수도사업소

(시설관리과)

「장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)

설계변경 보고(1차)

시설관리과장:성기옥☎3146-5190 기전팀장: 오해동☎5212 담당 : 전고운☎5203

장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)」2개소 전기인입 지점이 변경됨에 따라 물량 증감 내역을 반영하여 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)

ㅇ 공사기간: 2023. 9. 4. ~ 2025. 1. 3.

ㅇ 공사내용:**********

ㅇ 계약금액: *************

ㅇ 계 약 자: (*****************

□ 설계변경 세부내용

ㅇ 물량 변경: 1bed 및 2bed AC 인입지점 변경에 따른 물량 감소

ㅇ 변경금액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 금액	***********	***********	***********

ㅇ 세부변경내용

구 분	규 격	단위	1bed			2bed
			***	***	***	***	***	***
Cable	F-CV 10㎟ x 2C	m	***	**	***	***	**	****
전선관	ELP 30㎜	m	***	**	***	***	**	****
보도용블록 인력철거	차도인접, 주택가 보도 등	㎡	***	****	*****	***	****	******
보도용블록 재설치	차도인접, 주택가 보도 등	㎡	***	****	*****	***	****	******
인력 터파기	인력	㎥	***	*****	******	*****	*****	******
잔토처리	인력	㎥	***	*****	******	*****	*****	******
인력되메우기	인력	㎥	***	*****	******	*****	*****	******
기계다짐(양호)	램머	㎥	***	*****	******	*****	*****	******

□ 조치계획

ㅇ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 함

ㅇ 설계변경 심의위원회

- 일    시: **********************

- 방    법: 설계변경 서류 심의

- 내    용: 설계변경 타당성, 기타 관련규정 준수여부

- 위    원:*************************************

*************

붙임 1. 설계변경 내역서(1차) 1부.

2. 설계변경 합의서 1부.  끝.