실정보고(자전거도로 신설구간 포장방식 변경) 검토보고

공 사 명

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

공사개요

· 위    치 : 청계천~정릉천 합류부

· 사업기간 : '22.01.~'23.12.

· 총사업비 : 36억 원

· 시공사 : (주)태궁종합건설

· 감리단 : 수성엔지니어링 외1개

실정보고 건명

자전거도로 신설구간 포장방식 변경 검토보고

실정보고 사유

포장방식 자문회의 및 서울시설공단 의견 반영하여 자전거도로 및 산책로의 포장 변경(아스콘포장 t=5cm→15cm)을 검토 보고드림

건설사업관리단

검토의견

포장방식 자문회의(`'22.6.)결과 및 서울시설공단 요구에 따라 반사균열 방지를 위하여 아스콘포장 t=15cm 로 기시행한 정비구간(고산자교~용답역) 자전거도로 포장 방식으로 잔여구간(정릉천합류부~고산자교)도 동일하게 반영코자 함.

(자전거도로 : 보조기층 20cm+아스콘표층 5cm → 보조기층 20cm+아스콘기층10cm+표층5cm)

(산  책  로 : 보조기층 20cm+ 콘크리트 10cm → 보조기층 20cm+아스콘기층10cm+표층5cm)

관련근거

토목부-24791(2022.6.10.) : 자전거도로 포장방법 변경 자문회의 결과 보고

변경(안)

구분	당 초	변 경	비 고
규모	********* *************** ************* ************* *******************	************ ************************* ********* ************* ******************* ******************* *****************	************ ******************* ********* ****************** ******************* ******************* ****************
대상	************** ************* **************	************** ************* **************	**************** **************** *****************
도급비	*********	*********	********

예산조치 계획

사업비 범위내 시행가능 ( ㅇ )

추가 행정절차 이행 필요여부

발주처

검토의견

포장방식 자문회의 및 서울시설공단 의견을 반영하여 기 시행한 정비구간과 동일하게 아스콘포장 t=15cm로 잔여구간(정릉천합류부~고산자교, L=500m) 자전거도로 및 산책로를 포장하고자하는 건설사업관리기술인의 실정보고는 적정한 것으로 판단되므로 승인코자함.

결재

주무관

노승환

토목설계과장

박운용

토목부장

11/30

이임섭

협조

주무관

이나영