문서번호	홍보민원과-10739
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		홍보민원과장	경영관리부장
정재윤		홍승기	11/30
			안병희
협조	기획예산과장		문병기
	주무관		김영화

설계변경 검토보고(최종)

설계변경 검토보고(최종)

2023.  11.

상수도사업본부

(홍보민원과)

설계변경 검토보고(최종)

경영관리부장 : 안병희 ☎3146-1101   홍보민원과장 : 홍승기 ☎1210   담당 : 정재윤 ☎1217

｢아리수나라 시민공간 조성공사｣와 관련하여 신규공종 발생 및 시공물량 증·감에 따른 설계변경을 검토하고 다음과 같이 보고 드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 아리수나라 시민공간 조성공사

ㅇ 공사기간 : 2023. 8. 21. ~ 12. 8.

ㅇ 공사개요 : 부지면적 약 1,000㎡ (열린광장, 물빛놀이터, 피크닉가든 조성)

ㅇ 계약업체 : 주식회사 양림 대표자 박계양

ㅇ 계약금액 : 260,015,800원

□ 설계변경 내용 및 사유

[현장 실정보고 승인사항 반영]

ㅇ 신규공종 발생

- L형옹벽A 철거(H0~2000) 등 17개 공종

ㅇ 계약물량 변경

- 물량증가 : 인조화강석블럭포장A 등 12개 공종

- 물량감소 : 청단풍 철거 등 27개 공종

※ 관련문서 : 홍보민원과-10684호(2023. 11. 29.)

[제경비 등 정산]

ㅇ 보험료 등 제경비, 고용개선지원비 정산

□ 계약금액 변경 예정내역

(단위 : 원)

***	***	***	***	***
****	***********	***********	***********
*****	***********	***********	************
***********	***********	**********	***********

ㅇ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비 및 부대비,

시설비 (서비스장비 확충 및 환경개선)

※ 본 사업 집행잔액 및 낙찰차액(36,187,200원) 활용하여 설계변경 예정

□ 조치 계획

ㅇ 본부(안전조사과) 설계변경 심사완료 후 최종 설계변경 시행

붙임 : 1. 공사 실정보고에 따른 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 변경수량 산출서 1부.  끝.