문서번호	시설관리과-20166
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리팀장		시설관리과장
이연한	신동철	김용섭		11/30
				권승계
협 조

『2024년 장기사용 배급수관 정비관련 』

시험굴착 및 관상태 확인 계획 보고

2023. 11.

서부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)		□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2024년 장기사용 배급수관 정비 관련』

시험굴착 및 관상태 확인 계획 보고

2024년 장기사용 배급수관 정비 관련하여 '86년 상수도관(덕타일주철관) 대상으로 관 내부 상태를 확인하여 노후관 및 무라인닝관은 '24년 정비대상으로 선정하고자 아래와 같이 보고 드림

1		현 황

□ 은평구관내 '84~85년 상수도관 현황

(단 위 : m)

구 분	총연장	2023년 정비완료	제외대상				잔여 연장	비고
			소계	재개발	공사불가 (주민반대)	연결부
은평구	718.1	216.2	467	288.2	130.8	48	34.9

구 분	계		단위사업			연간단가		비고
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
은평구	2,630	3,020	1	1,534	1,800	1,096	1,220

※ 연결부 : 송배수관 퇴수밸브, 소화전 연결관로 등

□ '24년 장기사용 배급수관 정비계획

(단위:m, 백만원)

○ 은평구관내 장기사용 배급수관 정비대상인 '84~85년 덕타일주철관은  정비가 거의 완료되어 현재 34.9m 남아있는 실정임

○ 누수복구 공사 등 타 공사 굴착 시 발견된 일부 노후관 및 무라이닝관은 확인굴착하여 '24년 정비대상으로 선정하고,

○ 덕타일주철관 중성화로 인한 실코트 박리․박락으로 검은 알갱이가 발생된  '86년 주철관은 시험굴착하여 관상태를 확인 후 '24년 정비대상으로 선정하고자 함.

2		시험굴착 관로현황('86년)

연 번	사업구분	위 치	부설년도	관종	구경 (mm)	연장 (m)	비고
계		13개소				2,724
1	단위사업	갈현동526-6~529-35	1986	DCIP	80	183	적수민원
2		녹번동141-61~128-2	1986	DCIP	150	475	적수민원
3		신사동39-34~335-1	1986	DCIP	100	377	적수민원
4		증산동164-9~159-1	1986	DCIP	100	499	적수민원
5	연간단가	역촌동35-1~35-57	1986	PVC	80	130	누수복구 확인
6		역촌동11-42~11-46	1986	PVC	80	65	누수복구 확인
7		불광동525~479-951	1986	DCIP	80	190	적수민원
8		신사동26-36~26-25	1986	DCIP	80	140	적수민원
9		신사동28-432~28-45	1986	DCIP	80	140	적수민원
10		신사동28-1~28-11	1986	DCIP	80	130	적수민원
11		신사동37-22~37-17	1986	DCIP	80	120	적수민원
12		신사동38-1~38-33	1986	DCIP	80	95	적수민원
13		신사동200-4~200-19	1986	DCIP	80	180	적수민원

3		조 치 계 획

□ 상기 위치의 '86년 덕타일주철관을 시험굴착 후 관상태 확인 결과 관노후 및 무라이닝관은 2024년 장기사용 배급수관 정비대상으로 선정하고자 하며,

□ 시험굴착 및 관상태 확인 공사는 『2023년 은평구관내 상수도공사』업체 전흥종합건설(주) 조윤진에 작업지시하여 장기사용 배급수관 정비사업 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. '86년 덕타일주철관 시험굴착 위치도 1부.  끝.